프로젝트의 전개과정

프로젝트 착상 및 타당성 분석 → (설계)

구매•조달 → (시공)

시운전 및 완공 → (인도)

공개 경쟁 입찰 순서

입찰 공고 → 참가등록 → 설계도서 열람 및 교부 → (현장설명)

→ 질의 응답 → 견적기간 → 입찰등록 → 입찰 → 개찰 → 낙찰 → 계약

공사 계획의 일반적 순서

현장원 편성 → 공정표 작성 → 실행 예산 편성 → 하도급자의 선정

→ 가설준비물 결정 → 재료 선정 → 재해 방지

가치공학의 기본추진절차

대상선정 → 정보수집 → 기능정의, 정리, 평가 → 아이디어 발상 → 평가 → 제안 → 실시

토류벽의 수직터파기 공법

엄지말뚝박기 → 흙막이 벽판 설치 → 앵커용 보링 → 앵커 그라우팅 → 띠장설치 → 인장시험

아일랜드식 터파기 공법

흙막이 설치 → 중앙부 굴찰 → 중앙부 기초구조물 완성 → 버팀대 설치 → 주변 흙파기 → 지하구조물 완성

개방 잠함의 시공순서

지하 구조체 지상 설치 → 하부 중앙 흙을 파서 침하 → 중앙부 기초 구축 →주변 기초 구축

수평 버팀대의 흙막이 공법 시공순서

줄파기 → (규준대 대기) → (널말뚝 박기) → 흙파기 → (받침기둥 박기) → (띠장 및 버팀대 대기)

중앙부 흙파기 → 주변부 흙파기

지하 연속벽(slurry wall)공법 1PANEL

가이드 월 설치 → 굴착 → 안정액 투입 → stop end tube 설치 →철근망 설치 → 트레미관 설치

→ 콘크리트 타설 → stop end tube 인발

무리말뚝 시공순서

표토 걷어내기 → 수평규준틀 설치 → 말뚝 중심잡기

→ 가장자리 말뚝박기 → 중앙부 말뚝박기 → 말뚝머리정리

공동주택 건축물의 기초 시공순서

터파기 → 말뚝박기 → 말뚝머리 자르기 → 버림콘크리트 → 먹줄치기 → 거푸집 설치

→철근배근 → 콘크리트 부어넣기

베노토공법의 시공순서

(케이싱 튜브 세우기) → 굴착 → (철근망 넣기) → (트레미관 설치) →콘크리트 타설 → (케이싱튜브 인발)

CIP공법

철근 조립 → 모르타르 주입용 파이프 설치 → 자갈 다져 넣기 → 모르타르 주입

일반 건축물 철근 조립 순서

기초 → 기둥 → 벽 → 보 → 바닥 → 계단

철골 철근콘크리트 철근 조립순서

기초 → 기둥 → 보 → 벽 → 슬래브 → 계단

기초철근 조립순서

거푸집위치 먹줄치기 → 철근간격 표시 → 직교철근 배근 → 대각선 철근 배근

→스페이서 설치 → 기둥주근 설치 → 띠근 끼우기

RC조 일반건축물 1개층 시공순서

기초 거푸집 → 기초판, 기초보 배근 →기둥철근 기초에 정착 → 기초 콘크리트 타설 → 기둥철근 배근

→ 기둥과 벽의 내측 거푸집 → 벽철근 배근 → 벽의 외측 거푸집 → 보 및 바닥판 거푸집

→ 보철근 배근 → 바닥판철근 배근 → 콘크리트 타설

콘크리트 표준 배합설계 순서

소요강도의 결정 → 배합강도의 결정 → 시멘트강도의 결정 → 물시멘트비의 선정 → 슬럼프값의 결정

→ 굵은 골재 최대치수의 결정 → 잔골재율의 결정 → 단위수량의 결정 → 시방배합의 산출 및 조정

→현장배합의 조정

콘크리트를 부어넣는 시공순서

기초 → 기둥 → 벽 → 계단 → 보 → 바닥판

프리텐션 방식

PS강재 긴장 → 콘크리트 타설 → PS강재와 콘크리트 부착

포스트텐션 방식

시이드 설치 → 콘크리트 타설 → PS강재 삽입, 긴장, 고정 → 그라우팅

철골공사의 공장 가공 순서

공작도 및 원척도 작성 → 본뜨기(형판뜨기) → 변형바로잡기 → 금매김 → 절단 → 구멍 뚫기

가조립 → 리벳치기(본조립) → 검사 → 녹막이칠 → 운반

나중매입공법 철골공사

기초주각부 기타 중심먹매김 → (앵커볼트 설치) → (기초상부 고름질) → 철골세우기

→ (가조립) → 변형바로잡기 →(정조립) → 리벳접합 → 접합부 검사 → 도장

벽돌 및 블록쌓기 순서

벽돌면 청소 → 물축이기 → 재료 건비빔 → 세로 규준틀설치 → 벽돌 나누기 → 규준벽돌쌓기

→ 수평실치기 → 중간부쌓기 → 줄눈누름 → 줄눈파기 → 치장줄눈 → 보양

석재 표면마무리 방법(공구)

혹두기(쇠메) → 정다듬(정) → 도드락 다듬(도드락 망치) → 잔다듬(날망치) → 물갈기(숫돌)

지붕위 빗물 흘러내리는 순서

처마홈통 → 깔대기 홈통 → 장식통 → 선홈통 → 보호관 → 낙수받이돌

지하실 바깥방수 시공순서

잡석다짐 → 밑창 콘크리트 → 바닥방수층 시공 → 바닥 콘크리트 → 외벽 콘크리트 → 외벽 방수층 시공

→보호 누름 시공 → 되메우기

옥상 8층 아스팔트 방수공사

아스팔트 프라이머 → 아스팔트 → 아스팔트 펠트 → 아스팔트

아스팔트 루핑 → 아스팔트 → 아스팔트 루핑 → 아스팔트

모르타르 → 누름 콘크리트 → 아스팔트 방수층 → 바닥고르기 모르타르

시멘트 액체 방수층 공정 순서

방수액 침투 → 시멘트 풀 → 방수액 침투 → 시멘트 모르타르

시트 방수 시공순서

바탕처리 → (프라이머 칠하기) → 접착제 칠 → (시트 붙이기) → (마무리)

시트 방수공사

바탕처리 → 단열재 깔기 → 접착제 도포 → 시트붙이기 → 보강붙이기 → 조인트 실 →물채우기 시험

강제 창호 현장 설치 공법

현장반입 → (변형바로잡기 및 검사) → (녹막이 칠) → (먹매김) → 구멍파기, 따내기

→ (가설치 및 검사) → (묻음발 고정) → 창문틀 주위 모르타르 사춤 → (보양)

시멘트 모르타르 3회 바름 미장공사

바탕처리 → (바탕청소) → 재료비빔 → (초벌바름 및 라스먹임) → 초벌바름 방치기간

→ (고름질) → (재벌바름) → 정벌바름 → 마무리 → 보양

바닥바름 시공순서

청소 및 물씻기 → 순 시멘트페이스트 도포 → 모르타르 바름 → 규준대 밀기 →

나무흙손 고름질 → 쇠흙손 마감

회반죽 미장순서

바탕처리 → 재료조정 및 반죽 → 수염붙이기 → 초벌바름 → 고름질 및 덧먹임 → 재벌바름 →정벌바름

→ 마무리 → 보양

테라조 현장갈기

바닥청소 → (황동 줄눈대 설치) → (테라조 종석 바름) → (초벌 갈기) →(시멘트 풀먹임) → (정벌갈기)

→ 보양

바탕처리 → 줄눈대 대기 → 바름 → 양생 → 갈기 → 광내기

벽타일 붙이기 시공순서

바탕처리 → 타일 나누기 → 벽타일 붙이기 → 치장줄눈 → 보양

유성페인트

바탕만들기 → 연마 → 초벌칠 → 퍼티먹임 → 연마 → 재벌칠 1회 → 연마 → 재벌칠 2회 → 연마 → 정벌칠

수성페인트

바탕만들기 → 초벌 → 정벌

바탕만들기 → 바탕누름 → 초벌 → 연마 → 정벌

바니쉬

바탕처리 → 눈먹임 → 색올림 → 왁스문지름

목부바탕만들기 공정순서

오염•부착물 제거 → 송진처리 → 연마지 닦기 → 옹이  → 구멍

온수난방 온돌 공사

바닥 콘크리트 → 방습층 설치 → 단열재 깔기 → 자갈채움 → 버림 콘크리트

→ 파이프 배관 → 미장 모르타르 → 장판지 마감

계단 논슬립 나중설치 순서

(가설 나무벽돌 설치) → 콘크리트 타설

→ (가설 나무벽돌 제거 및 구멍청소) → (다리철물 설치)

→ 사춤 모르타르 구멍 메우기 → (나무망치로 논슬립 고정) → (보양)

프리패브 건축의 공장작업 순서

베드,거푸집 청소 → 거푸집 조립 → 개구부 프레임설치 → 철근,철물류 삽입 → 설비,전기 배관

→ 중간 검사 → 콘크리트 타설 → 표면마무리 → 보양 → 거푸집 해체

공정계획 순서

네트워크 작성준비 → 전체 프로젝트를 단위 작업으로 분해 → 네트워크 작성 → 각 작업의 작업시간 선정

→ 일정계산 → 공사기일의 조정 → 공정표 작성

MCX기법 순서

주공정선상의 작업을 선택 → 단축가능한 작업이어야 한다 → 우선 비용구배가 최소인 작업을 단축

→ 단축한계까지 단축 → 보조주공정선의 발생 확인 → 보조주공정선의 동시 단축 경로를 고려

→ 앞의 순서 반복