은성기초건설 작업일보

일 자	내 용
2004.11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23 11.24 11.25 11.26 11.27 11.28 11.29 11.30 12.1	파일 인양시험 준비 작업(절단 및 그라인드) C/R 작업도구 및 인부 작업장 올려주기 인양시험 파일 설치 용접 시험 강관(파일) 용접 및 절단 절단부위 그라인드 작업 시험파일 설치 준비 작업, 설치 용접(절단 용접 그라인드) H빔 설치 인양시험 준비완료 그라인다 및 작키 설치 뽄통 수리, 오후 인양시험 오전 인양시험, 뽄통수리, 인양시험 완료 오후 H빔 PCO 철거 및 강관 절단 해체 600빔 철거(재하시험) 파일 연결 준비 작업(직타구간)(바지선 및 연결 강관(조인 파일) 선적, 작업대 설치) 강관파일 취부 및 용접 1EA 강관파일 취부(용접시 R.T 시험후 용접) 2EA 2EA(오후) 준비 취부 1EA 용접 : 2EA(오전), 1EA(오후) 취부 2EA 및 용접 3EA 1EA 용접 유리 시험, 바지선 재하 시험 장소로 이동 셋팅 재하시험장 H빔 해체 선적 재하시험장 H빔 해체 선적 재하시험장 강관파일 수중절단 철거 바이브로 함마 700Φ 강관인발 4EA(27m) 1000Φ 강관 조인 준비 및 조인 바지선 이동 셋팅 등 재하 준비 동재하 준비 현장사정 대마 재하시험 준비, 빔 설치 및 도루판 설치 강관파일 절단 800Φ 강관 절단 1000Φ 철판 설치 강관 절단 1000Φ 센터 400빔 설치, 600빔 설치 및 해체 900 및 600 빔 설치 용접 900Φ 인양, 용접 우천 검사 검사 해체(블럭 및 빔) 해체 빔 및 강관. 인발시험 준비 블럭반납(남항) 블럭반납(영도)