90년 1회

2. 공장제작 P.C 제품 제작순서를 보기에서 골라 기호로 쓰시오.(6점)

<보기>

(1)거푸집 청소  (2)콘크리트 타설     (3)표면 마무리

(4)거푸집 탈형  (5)양생  (6)중간검사  (7)창문틀 설치

(8)철근조립     (9)설비재설치        (10)거푸집 조립

(1)거푸집 청소 ▶(10)거푸집 조립 ▶(7)창문틀 설치

▶(8)철근조립 ▶(9)설비재설치 ▶(6)중간검사 ▶(2)콘크리트 타설 ▶(3)표면 마무리 ▶(5)양생 ▶(4)거푸집 탈형

3.건축공사의 콘크리트 타설순서를 보기에서 골라 번호로 쓰시오.(5점)

<보기>

(1)기초  (2)보  (3)기둥   (4)파라펫   (5)바닥판

(1)기초▶(3)기둥▶(2)보▶(5)바닥판▶(4)파라펫

8.석공사에서 쓰이는 공구명칭을 시공순서로 따라 보기에서 골라 쓰시오.

<보기>

(1)쇠메  (2)날망치  (3)도드락 망치   (4)정   (5)숫돌

(1)쇠메▶(4)정▶(3)도드락 망치▶(2)날망치▶(5)숫돌

10.다음 수량 산출시 할증율이 작은 것부터 큰 것의 순서를 보기에서 골라 번호로 쓰시오.(2점)

<보기>

(1)이형철근  (2)원형철근  (3)대형형강   (4)강판

(1)이형철근 ▶(2)원형철근 ▶(3)대형형강 ▶(4)강판

11.Eaeth anchor tie back에 의한 흙막이 시공순서를 보기에서 골라 번호를 쓰시오.(6점)

<보기>

(1)어미 말뚝을 박는다.  (2)흙파기를 한다.

(3)토류판을 설치한다.   (4)앵커를 긴장 및 정착시킨다.

(5)띠장을 설치한다.  (6)어스 앵커드릴로 구멍을 뚫는다.  (7)P.C 케이블을 삽입하고 그라우트 한다.

(1)어미 말뚝을 박는다. ▶(2)흙파기를 한다 ▶(3)토류판을 설치한다. ▶(6)어스 앵커드릴로 구멍을 뚫는다.

▶(7)P.C 케이블을 삽입하고 그라우트 한다. ▶(5)띠장을 설치한다. ▶(4)앵커를 긴장 및 정착시킨다.

12.공동주택 건축물의 기초를 시공하고자 한다. 시공순서를 보기에서 골라 기호를 쓰시오.(6점)

<보기>

(1)터파기    (2)말뚝머리자르기  (3)먹줄치기

(4)철근배근  (5)거푸집 설치     (6)버림 콘크리트

(7)콘크리트 부어넣기            (8)말뚝박기

(1)터파기 ▶(8)말뚝박기 ▶(2)말뚝머리자르기 ▶(6)버림 콘크리트 ▶(3)먹줄치기 ▶(5)거푸집 설치 ▶(4)철근배근

▶(7)콘크리트 부어넣기

90년 2회

2.강제창호의 제작순서를 보기에서 골라 번호를 쓰시오.(4점)

<보기>

(1)원척도 (2)구부리기 (3)용접 (4)녹떨기 (5)접합부 검사

(6)절단   (7)변형바로잡기     (8)금매김 (9)조립

(1)원척도 ▶(4)녹떨기 ▶(7)변형바로잡기 ▶(8)금매김 ▶(6)절단 ▶(2)구부리기 ▶(9)조립 ▶(3)용접 ▶(5)접합부 검사

4.건설업 품질관리의 4싸이클 순서를 보기에서 골라 번호를 쓰시오.(4점)

<보기>

(1)시정 (2)보정 (3)실시 (4)계획 (5)제한 (6)확인

(4)계획 ▶(3)실시 ▶(6)확인 ▶(1)시정

6.다음 보기의 마감공사 항목을 시공순서에 따라 번호를 쓰시오.(4점)

<보기>

(1)벽미장(회반죽) 마감         (2)바닥깔기(비닐타일)

(3)징두리설치(인조 대리석판)   (4)창 및 출입문(섀시)

(5)걸레받이설치(인조 대리석판)

(4)창 및 출입문(섀시) ▶(1)벽미장(회반죽) 마감 ▶(3)징두리설치(인조 대리석판) ▶(5)걸레받이설치(인조 대리석판) ▶(2)바닥깔기(비닐타일)

90년 3회

11.목조계단 설치 시공순서를 보기에서 골라 번호로 쓰시오.(4점)

<보기>

(1)난간두겁              (2)계단옆판, 난간어미기둥

(3)난간동자              (4)디딤판, 챌판

(5)1층 멍에, 계단참, 2층 받이보

(5)1층 멍에, 계단참, 2층 받이보 ▶(2)계단옆판, 난간어미기둥 ▶(4)디딤판, 챌판 ▶(3)난간동자 ▶(1)난간두겁

90년 4회

3.다음 철근 콘크리트 시공에 있어 콘크리트의 이행순서를 보기에서 골라 기호로 쓰시오.(4점)

<보기>

(1)버켓  (2)믹서  (3)타워호퍼  (4)경사슈우트  (5)플로어호퍼   (6)두 바퀴 손차

(2)믹서 ▶(1)버켓 ▶(3)타워호퍼 ▶(4)경사슈우트

▶(5)플로어호퍼 ▶(6)두 바퀴 손차

5.지내력시험 순서를 쓰시오.(4점)

(1)시험면파기 →(2)         →(3)            →(4)

→(5)           →(6)장기허용지내력산출

(2)재하판설치 (3)하중대 설치 (4)적재 및 침하량 측정

(5)단기허용지내력 산출

9.철골공사의 리벳접합의 경우 현장 작업순서를 보기에서 골라 쓰시오.(5점)

<보기>

(1)기초 주각부 기타 심먹매김  (2)접합부 검사

(3)변형바로잡기 (4)앵커 볼트 설치 (5)도장 (6)철골세우기

(7)정조임(본조립)  (8)가조립   (9)기초 상부 고름질

(10)리벳접합

(1)기초 주각부 기타 심먹매김 ▶(4)앵커 볼트 설치 ▶(9)기초 상부 고름질 ▶(6)철골세우기 ▶(8)가조립 ▶(3)변형바로잡기 ▶(7)정조임(본조립) ▶(10)리벳접합 ▶(2)접합부 검사 ▶(5)도장

20.슬러리 월(slurry wall)의 시공순서를 보기에서 골라 쓰시오.(5점)

(guidr wall 설치)

↓         ←(안정액 plant 설치)

(1.             )

↓         ←(이수중 모래제거)

(2.             )

↓         ←(철근 조립)

(3             )

↓

(4             )

↓

(5             )

↓

(6             )

<보기>

(가)앤드 파이프 철거 (나)철망 삽입

(다)콘크리트 타설 (라)트레미관 설치

(마)앤드 파이프 설치 (바)굴착

(1)(바)굴착

(2)(마)앤드 파이프 설치

(3)(나)철망 삽입

(4)(라)트레미관 설치

(5)(다)콘크리트 타설

(6)(가)앤드 파이프 철거

91년 1회

6.강재창호 설치 시공순서를 쓰시오.(4점)

<보기>

(1)현장반입             (2) (가)   (3) (나)   (4) (다)

(5)구멍파기, 따내기     (6) (라)   (7) (마)

(8) 창문틀 주위 사춤    (9) (바)

(가)변형바로잡기 (나)녹막이 칠 (다)먹매김 (라)가설치 및 검사 (마)묻음발 고정 (바)보양

8.공개경쟁입찰의 순서를 쓰시오.(4점)

(1)입찰공고    (2) ①    (3) ②    (4) ③    (5) ④

(6) 견적기간   (7) ⑤    (8) ⑥     (9) ⑦

(10) ⑧         (11)계약

(1)입찰공고 (2)①참가등록 (3)②설계도서열람및교부 (4)③현장설명 (5)④질의응답 (6)견적기간

(7)⑤입찰등록 (8)⑥입찰 (9)⑦개찰 (10)⑧낙찰  (11)계약

9.시멘트 모르타르 미장공사 중 바닥바름의 시공순서를 보기에서 골라 기호로 스시오.(3점)

<보기>

(1)모르타르 바름   (2)규준대 밀기  (3)순시멘트풀 도포

(4)청소 및 물씻기  (5)나무 흙손 고름질 (6)쇠흙손 마감

(4)청소 및 물씻기 ▶(3)순시멘트풀 도포 ▶(1)모르타르 바름 ▶(2)규준대 밀기 ▶(5)나무 흙손 고름질 ▶(6)쇠흙손 마감

11.일반적인 콘크리트 배합설계 순서를 보기에서 골라 번호로 쓰시오.(4점)

<보기>

(1)시방배합의 결정     (2)배합강도의 결정

(3)물, 시멘트비 결정    (4)잔골재율의 결정

(5)소요강도의 결정     (6)현장 배합의 결정

(7)시멘트 강도의 결정  (8)온도 및 표준편차의 결정

(5)소요강도의 결정 ▶(8)온도 및 표준편차의 결정 ▶(2)배합강도의 결정 ▶(7)시멘트 강도의 결정 ▶(3)물, 시멘트비 결정 ▶(4)잔골재율의 결정 ▶(1)시방배합의 결정 ▶(6)현장 배합의 결정

12.목재면 유성 페인트칠의 공정순서를 보기에서 골라 기호로 쓰시오(4점)

<보기>

(1)재벌칠 2회  (2)퍼티먹임  (3)바탕 만들기  (4)연마

(5)재벌칠 1회  (6)초벌칠    (7)정벌칠

(3)바탕만들기 ▶(4)연마 ▶(6)초벌칠 ▶(2)퍼티먹임 ▶(4)연마 ▶(5)재벌칠 1회 ▶(4)연마 ▶(1)재벌칠 2회 ▶(4)연마 ▶(7)정벌칠

13.RC조 일반적인 건축물 1개층의 시공순서를 보기에서 골라 나열하시오.(4점)

<보기>

(1)기초옆, 지중보 거푸집 설치

(2)보의 철근 배근

(3)기둥철근 배근

(4)보밑창판, 옆판 및 바닥판 거푸집 설치

(5)바닥판 철근의 배근

(6)기초판 철근 배근, 지중보 철근 배근

(7)기초판(지하실 바닥판, 지중보) 콘크리트 타설

(8)기둥, 벽, 보, 바닥판 콘크리트 타설

(9)기둥철근 기초에 정착

(10)벽의 철근 배근

(11)기둥 거푸집, 벽한쪽 거푸집 설치

(12)벽의 딴편 거푸집 설치

(1)기초옆, 지중보 거푸집 설치 ▶(6)기초판 철근 배근, 지중보 철근 배근 ▶(9)기둥철근 기초에 정착 ▶(7)기초판(지하실 바닥판, 지중보) 콘크리트 타설 ▶(3)기둥철근 배근 ▶(11)기둥 거푸집, 벽한쪽 거푸집 설치 ▶(10)벽의 철근 배근 ▶(12)벽의 딴편 거푸집 설치 ▶(4)보밑창판, 옆판 및 바닥판 거푸집 설치 ▶(2)보의 철근 배근 ▶(5)바닥판 철근의 배근 ▶(8)기둥, 벽, 보, 바닥판 콘크리트 타설

15.연결재 또는 당겨매기식 흙막이 공법 시공순서를 보기에서 골라 기호로 쓰시오(4점)

<보기>

(1)로프 당겨 매기  (2)말뚝 상부 띠장(ㄱ자 형강)

(3)널말뚝          (4)흙파기        (5)어미말뚝

(5)어미말뚝 ▶(3)널말뚝 ▶(2)말뚝 상부 띠장(ㄱ자 형강)  ▶(1)로프 당겨 매기 ▶(4)흙파기

91년 2회

14.다음 보기의 재료만을 이용하여 아스팔트 3겹 방수의 전 공정 시공순서를 번호로 쓰시오.(3점)

<보기>

(1)아스팔트 펠트  (2)아스팔트 프라이머  (3)아스팔트

(2)아스팔트 프라이머 ▶(3)아스팔트 ▶(1)아스팔트 펠트▶(3)아스팔트 ▶(1)아스팔트 펠트 ▶(3)아스팔트 ▶(1)아스팔트 펠트 ▶(3)아스팔트

91년 3회

8.목재 접착제 중 내수성이 큰 것부터 순서를 보기에서 골라 기호로 쓰시오.(3점)

<보기>

(1)아교      (2)페놀수지      (3)요소수지

(2)페놀수지 ▶(3)요소수지 ▶(1)아교

15.다음 보기의 홈통 관계 용어 중 지붕면에서 지상으로 배수되는 일련의 과정을 기호로 순서를 쓰시오.(4점)

<보기>

(1)보호관   (2)처마홈통   (3)장식통   (4)낙수받이돌

(5)선홈통   (6)깔대기 홈통

(2)처마홈통 ▶(6)깔대기 홈통 ▶(3)장식통 ▶(5)선홈통 ▶(1)보호관 ▶(4)낙수받이돌

20.건축공사 진행과정중 공사비 지급금의 명칭을 순서적으로 쓰시오.(3점)

➀(        )  → ➁(        )  → ➂(        )

→ ➃(        )

➀착공금(선수금) →➁중간불(기성불) →➂준공불(완공불) →➃하자보증금

92년 1회

12.벽, 시멘트, 모르타르 3회 바름시공 순서를 보기에서 골라 기호로 쓰시오(5점)

<보기>

(1)바탕청소  (2)보양   (3)바탕처리  (4)마무리

(5)재벌      (6)초벌   (7)고름질

(3)바탕처리 ▶(1)바탕청소 ▶(6)초벌 ▶(7)고름질 ▶(5)재벌 ▶(4)마무리 ▶(2)보양

92년 2회

2.목재의 바니쉬칠 공정의 작업순서를 보기에서 골라 기호로 쓰시오.(4점)

<보기>

(1)색올림  (2)왁스문지름  (3)바탕처리  (4)눈먹임

(3)바탕처리 ▶(4)눈먹임 ▶(1)색올림 ▶(2)왁스문지름

18.지붕위의 빗물이 흘러가는 순서를 보기에서 골라 기호로 쓰시오.(6점)

<보기>

(1)장식통             (2)보호관

(3)처마홈통           (4)낙수받이틀

(5)깔대기 홈통         (6)선홈통

(3)처마홈통 ▶(5)깔대기 홈통 ▶(1)장식통 ▶(6)선홈통

▶(2)보호관 ▶(4)낙수받이틀

92년 3회

11.90년4회 출제(동일)

13.온수난방 온돌공사의 시공순서를 보기에서 골라 번호를 쓰시오.(4점)

<보기>

(1)파이프 배관    (2)방습층 설치    (3)자갈채움

(4)장판지 마감     (5)버림 콘크리트  (6)단열재 깔기

(7)바닥 콘크리트   (8)미장모르타르

(7)바닥 콘크리트 ▶(2)방습층 설치 ▶(6)단열재 깔기 ▶(3)자갈채움 ▶(5)버림 콘크리트 ▶(1)파이프 배관

▶(8)미장모르타르 ▶(4)장판지 마감

16.개방잠함(Open Caisson)의 시공순서를 보기에서 골라 기호로 쓰시오.(3점)

<보기>

(1)지하 구조체 지상설치   (2)중앙부 기초구축

(3)주변 기초구축          (4)하부 중앙흙을 파서 침하

(1)지하 구조체 지상설치 ▶(4)하부 중앙흙을 파서 침하 ▶(2)중앙부 기초구축 ▶(3)주변 기초구축

92년 4회

4.일반적 건축공사의 견적단계 순서를 보기에서 골라 기호로 쓰시오.(4점)

<보기>

(1)단가(일위대가표)  (2)견적가격  (3)이윤  (4)수량조사

(5)일반관리비부담금  (6)가격      (7)현장경비

(4)수량조사 ▶(1)단가(일위대가표) ▶(6)가격 ▶(7)현장경비 ▶(5)일반관리비부담금 ▶(3)이윤 ▶(2)견적가격

11.무리말뚝 기초공사에 관한 사항이다. 일반적인 시공순서를 보기에서 골라 기호로 쓰시오.(4점)

<보기>

(1)수평규준틀 설치    (2)중앙부말뚝박기

(3)가장자리말뚝박기   (4)말뚝 중심잡기

(5)표토 걷어내기      (6)말뚝머리정리

(5)표토 걷어내기 ▶(1)수평규준틀 설치 ▶(4)말뚝 중심잡기 ▶(3)가장자리말뚝박기 ▶(2)중앙부말뚝박기 ▶(6)말뚝머리정리

23.도장공사를 위한 목부바탕만들기 공정순서를 보기에서 골라 쓰시오.(4점)

<보기>

(1)송진처리   (2)구멍땜  (3)옹이땜

(4)오염, 부착물 제거    (5)연마지닦기

(4)오염, 부착물 제거 ▶(1)송진처리 ▶(5)연마지닦기

▶(3)옹이땜 ▶(2)구멍땜

93년 1회

4.콘크리트 표준 배합설계 순서를 보기에서 골라 기호로 쓰시오.(4점)

<보기>

(가)슬럼프값의 결정      (나)시방배합의 산출 및 조정

(다)배합강도의 결정      (라)물, 시멘트비의 산정

(마)잔골재율의 결정           (바)소요 강도의 결정

(사)굵은골재 최대치수의 결정  (아)현장배합의 조정

(자)시멘트강도의 결정         (차)단위 수량의 결정

(바)소요 강도의 결정 ▶(다)배합강도의 결정 ▶(자)시멘트강도의 결정 ▶(라)물, 시멘트비의 산정 ▶(가)슬럼프값의 결정 ▶(사)굵은골재 최대치수의 결정 ▶(마)잔골재율의 결정 ▶(차)단위 수량의 결정 ▶(나)시방배합의 산출 및 조정 ▶(아)현장배합의 조정

9.연속 지중벽 1개PANEL 시공순서를 보기에서 골라 쓰시오.(5점)

<보기>

(가)Guide wall설치  (나)굴착  (다)안정액 투입

(라)양생  (마)콘크리트 타설   (바)inter locking pipe 설치  (사)철근망 설치   (아)inter locking pipe 인발

(가)Guide wall설치 ▶(나)굴착 ▶(다)안정액투입

▶(바)inter locking pipe 설치 ▶(사)철근망 설치 ▶(마)콘크리트 타설 ▶(아)inter locking pipe 인발 ▶(라)양생

10.아일랜드식 터파기 공법의 시공순서를 번호로 쓰시오.(5점)

<보기>

(1)중앙부 기초구조물 축조   (2)주변 흙파기

(3)버팀대 설치             (4)지하구조물 완성

(5)중앙부 굴착             (6)흙막이 설치

(6)흙막이 설치 ▶(5)중앙부 굴착 ▶(1)중앙부 기초구조물 축조 ▶(3)버팀대 설치 ▶(2)주변 흙파기 ▶(4)지하구조물 완성

11.벽체에 시멘트 모르타르 3회 바름하는 미장공사의 시공순서를 쓰시오.(4점)

바탕처리 → ( ➀ ) → 재료비빔 → ( ➁ ) →

초벌바름 방치기간 →( ➂ ) → ( ➃ ) → 정벌바름 →

( ➄ ) → ( ➅ )

바탕처리 → (➀바탕청소 ) → 재료비빔 → (➁초벌바름 및 라스먹임 ) → 초벌바름 방치기간 →(➂고름질 ) → (➃재벌바름 ) → 정벌바름 →

(➄마무리 ) → (➅보양 )

18.계단 논슬립(Non slip)설치에에서 나중설치 순서를 쓰시오.(3점)

( ➀ ) → 콘크리트 타설 → ( ➁ ) → ( ➂ ) → 사춤모르타르 구멍메우기 → ( ➃ ) → ( ➄ )

(➀가설나무벽돌 설치) → 콘크리트 타설 → (➁나무벽돌 제거 및 청소 ) → (➂다리철물 설치 ) → 사춤모르타르 구멍메우기 → (➃논슬립 고정 ) → (➄보양 )

20.R.C조 지상 1층 건축물이 골조공사에 관한 사항이다. 시공순서를 보기에서 골라 번호를 쓰시오.(6점)

<보기>

(1)기둥철근 기초에 정착

(2)보 및 바닥판 철근 배근

(3)기둥 철근 배근

(4)벽내부 거푸집 및 기둥 거푸집 설치

(5)콘크리트 치기

(6)벽 철근배근

(7)기초판, 기초보 철근 배근

(8)보 및 바닥판 거푸집 설치

(9)기초판 및 기초보 콘크리트치기

(10)기초 및 기초보 옆 거푸집 설치

(11)벽외부 거푸집 설치

(10)기초 및 기초보 옆 거푸집 설치 ▶(7)기초판, 기초보 철근 배근 ▶(1)기둥철근 기초에 정착 ▶(9)기초판 및 기초보 콘크리트치기 ▶(3)기둥 철근 배근 ▶(4)벽내부 거푸집 및 기둥 거푸집 설치 ▶(6)벽 철근배근 ▶(11)벽외부 거푸집 설치 ▶(8)보 및 바닥판 거푸집 설치 ▶(2)보 및 바닥판 철근 배근 ▶(5)콘크리트 치기

93년 3회

3.다음 보기의 토질 중에서 굴착에 의한 토량이 가장 크게 증가하는 것부터 순서대로 그 번호를 쓰시오.(4점)

<보기>

(1)점토                  (2)점토, 모래, 자갈의 혼합토

(3)모래 또는 자갈        (4)암석

(4)암석  ▶(2)점토, 모래, 자갈의 혼합토  ▶(1)점토

▶(3)모래 또는 자갈

14.지하 연속벽(Slurry wall)공법의 1개 pannel 시공순서를 다음 보기에서 골라 쓰시오.(5점)

“가이드 월 설치 ㅡ (  가  ) ㅡ (  나  ) ㅡ (  다  ) ㅡ (  라  ) ㅡ 트레미관 설치 ㅡ (  마  ) ㅡ stop end tube 인발“

“가이드 월 설치ㅡ(가.굴착)ㅡ(나.슬라임 제거)ㅡ (다.stop end tube 설치)ㅡ(라.철근망 설치)ㅡ트레미관 설치ㅡ(마.콘크리트 타설)ㅡstop end tube 인발“

<보기>

(1)슬라임 제거  (2)굴착  (3)철근망 설치

(4)콘크리트 타설 (5)stop end tube 설치

21.다음은 콘크리트의 슬럼프 테스트 순이다. 빈 칸을 완성하시오.(4점)

(1)수밀평판을 수평으로 한다.

(2)          (가)

(3)          (나)

(4)          (다)

(5)위의 (3)항과 (4)항의 작업을 2회 되풀이하고 윗면을     고른다.

(6)슬럼프 콘을 조용히 들어 올린다.

(7)          (라)

(1)수밀평판을 수평으로 한다.

(2)(가)슬럼프콘을 평판 중앙에 놓는다.

(3)(나)슬럼프콘에 체적의 1/3되게 콘크리트를 채운다.

(4)(다)다짐막대로 25회 다진다.

(5)위의 (3)항과 (4)항의 작업을 2회 되풀이하고 윗면을     고른다.

(6)슬럼프 콘을 조용히 들어 올린다.

(7)(라)콘크리트에 남아있는 높이를 측정하여 30cm에서 뺀 값, 슬럼프 치를 구한다.

93년 4회

5.생콘크리트(Ready Mixed Concete)의 수입과 운반에 과한 일반적인 작업도이다. 보기에서 골라 빈 곳을 채우시오.(4점)

공장				평균 약 60분(최대 90분)
				약평균28분·		약평균20분			약평균12분
약1분			약2~3분	(나)			(다)			(라)
(가)			실기시간

<보기>

(1)처리시간  (2)대기시간  (3)적재시간  (4)비빔시간  (5)주행시간

(가)(4)비빔시간     (나)(5)주행시간       (다)(2)대기시간       (라)(1)처리시간

16.품질관리의 순서를 보기에서 골라 순서대로 나열하시오.(4점)

<보기>

➀작업표준  ➁품질표준  ➂품질조사

➃수정조치의 조사       ➄수정조치

➁품질표준 ▶➀작업표준 ▶➂품질조사 ▶➄수정조치 ▶➃수정조치의 조사

19.토류벽을 이용한 수직 터파기 공법의 순서를 보기에서 골라 번호를 쓰시오.(4점)

<보기>

➀앵커용 보링  ➁엄지 말뚝 박기    ➂인장시험

➃띠장설치    ➄앵커 그라우팅     ➅흙막이 벽관 설치

➁엄지 말뚝 박기 ▶➅흙막이 벽관 설치 ▶➀앵커용 보링 ▶➄앵커 그라우팅 ▶➃띠장설치 ▶➂인장시험

94년 1회

1.콘크리트 블록쌓기 순서대로 번호를 쓰시오.(3점)

<보기>

(가)사춤콘크리트 채우기

(나)세로 규준대 설치

(다)하부고르기 모르타르 및 물축이기

(라)블록쌓기

(마)메쉬 및 철근 세우기

(다)하부고르기 모르타르 및 물축이기 ▶(나)세로 규준대 설치 ▶(마)메쉬 및 철근 세우기 ▶(라)블록쌓기 ▶(가)사춤콘크리트 채우기

12.수평 버팀대식 흙막이 공법의 시공순서를 쓰시오.(4점)

“줄파기 ㅡ ( 가 ) ㅡ ( 나 ) 흙파기 ㅡ ( 다 ) ㅡ ( 라 ) ㅡ 중앙부 흙파기 ㅡ 주변부 흙파기“

“줄파기 ㅡ (가.규준대 대기) ㅡ (나.널말뚝 박기) 흙파기 ㅡ (다.받침기둥 박기) ㅡ (라.띠장 및 버팀대 대기) ㅡ 중앙부 흙파기 ㅡ 주변부 흙파기“

14.콘크리트 배합설계 순서를 스시오.(4점)

“소요강도 ㅡ ( 가 ) ㅡ ( 나 ) ㅡ ( 다 ) ㅡ ( 라 ) ㅡ

( 마 ) ㅡ 계획   배합 결정”

“소요강도 ㅡ (가.배합강도의 결정) ㅡ (나.시멘트 강도의 결정) ㅡ (다.물,시멘트비의 결정) ㅡ (라.슬럼프값 결정) ㅡ (마.시험방법) ㅡ 계획   배합 결정”

94년 2회

14.테라조 현장갈기의 시공순서를 쓰시오.(3점)

<보기>

바닥청소 ㅡ ( 가 ) ㅡ ( 나 ) ㅡ ( 다 ) ㅡ ( 라 ) ㅡ

( 마 ) ㅡ 보양

바닥청소ㅡ(가.줄눈나누기 먹줄치기)ㅡ(나.황동 줄눈대 설치)ㅡ(다.테라조 종석 바름)ㅡ(라.경화)ㅡ(마.갈기)ㅡ보양

16.아일랜드식 터파기 공법의 시공순서를 쓰시오.(4점)

<보기>

“흙막이 설치 ㅡ ( 가 ) ㅡ ( 나 ) ㅡ ( 다 ) ㅡ ( 라 ) ㅡ 지하구조물완성”

“흙막이 설치 ㅡ (가.중앙부 굴착) ㅡ (나.중앙부 기초 구조물 축조) ㅡ (다.버팀대 설치) ㅡ (라.주변 흙파기) ㅡ 지하구조물완성”

17.경량 철골 반자틀 시공순서를 스시오.(4점)

<보기>

인서트 매입 ㅡ ( 가 ) ㅡ ( 나 ) ㅡ ( 다 ) ㅡ ( 라 ) ㅡ ( 마 )

인서트 매입 ㅡ (가.행거볼트 및 행거 설치) ㅡ (나.반자돌림대 설치) ㅡ (다.천장틀받이 설치) ㅡ (라.천장틀 설치) ㅡ (마.천장판(마감재) 부착)

18.건축물 구조부 중에서 콘크리트를 부어넣는 시공순서를 보기에서 골라 기호를 쓰시오.(4점)

<보기>

(가)보  (나)기둥  (다)바닥판  (라)계단  (마)벽

(나)기둥 ▶(마)벽 ▶(라)계단 ▶(가)보 ▶(다)바닥판

94년 3회

4.일반적인 무리말뚝의 시공순서를 보기에서 골라 순서대로 쓰시오.(4점)

<보기>

(1)말뚝중심잡기     (2)표토 걷어내기

(3)말뚝머리 정리    (4)가장자리 말뚝박기

(5)중앙부 말뚝박기  (6)정리된 지반에 수평규준틀 설치

(2)표토 걷어내기 ▶(6)정리된 지반에 수평규준틀 설치 ▶(1)말뚝중심잡기 ▶(4)가장자리 말뚝박기 ▶(5)중앙부 말뚝박기 ▶(3)말뚝머리 정리

10.일반적인 건축공사의 견적단계 순서를 골라 기호로 쓰시오.(4점)

<보기>

(가)단가(일위대가표)  (나)견적단계 (다)이윤  (라)수량조사

(마)일반관리비 부담금  (바)가격   (사)현장경비

(라)수량조사 ▶(가)단가(일위대가표) ▶(바)가격 ▶(사)현장경비 ▶(마)일반관리비 부담금 ▶(다)이윤 ▶(나)견적단계

17.도장공사를 위한 목부바탕 만들기 공정 순서를 보기에서 골라 쓰시오.(4점)

<보기>

(1)송진처리      (2)구멍땜         (3)옹이땜

(4)오염, 부착물 제거  (5)연마지닦기

(4)오염, 부착물 제거 ▶(1)송진처리 ▶(5)연마지닦기

▶(3)옹이땜 ▶(2)구멍땜

95년 1회

6.보기에 있는 항목들은 공사도급에 관한 사항들이다. 공개경쟁 입찰의 내용만 골라서 순서대로 쓰시오.(4)

<보기>

(1)시공계획 (2)입찰공고   (3)발주       (4)참가등록

(5)입찰     (6)견적       (7)현장설명   (8)개찰

(9)낙찰    (10)설계도서열람           (11)입실       (12)질의응담   (13)계약

(2)입찰공고 ▶(4)참가등록 ▶(10)설계도서열람 ▶(7)현장설명 ▶(12)질의응담 ▶(6)견적 ▶(5)입찰 ▶(8)개찰

▶(9)낙찰(13)계약

95년 2회

6.다음 보기의 지반중에서 지내력이 큰 것부터 순서를 쓰시오.(3점)

<보기>

(가)자갈           (나)자갈, 모래반섞이   (다)경암반

(라)모래섞인 진흙  (마)연암반             (바)진흙

(다)경암반(마)연암반(가)자갈 (나)자갈, 모래반섞이(라)모래섞인 진흙(바)진흙

12.PC에 있어서 프리스트레스를 주는 방법에는 프리텐션공법과 포스트텐션 공법이 있다. 부재의 제작 과정을 각 공법에 따라 순서대로 기호로 쓰시오.(4점)

<보기>

(A)프리스트레싱 포스를 콘크리트에 전달

(B)콘크리트 타설  (C)P.C 강재의 긴장

(D)부재내의 강재의 도관설치

(E)P.S 강재와 콘크리트의 부착

(가)프리텐션 공법:(C)P.C 강재의 긴장 ▶(B)콘크리트 타설 ▶(E)P.S 강재와 콘크리트의 부착 ▶(A)프리스트레싱 포스를 콘크리트에 전달

(나)포스트 텐션 공법:(D)부재내의 강재의 도관설치 ▶(B)콘크리트 타설 ▶(C)P.C 강재의 긴장 ▶(E)P.S 강재와 콘크리트의 부착 ▶(A)프리스트레싱 포스를 콘크리트에 전달

15.테라죠 현장갈기의 시공 공정순서를 번호로 쓰시오.(4점)

<보기>

(1)줄눈대 대기    (2)바름          (3)바탕처리

(4)갈기           (5)양샹          (6)광내기

(3)바탕처리▶ (1)줄눈대 대기 ▶(2)바름 ▶(5)양샹 ▶

(4)갈기 ▶(6)광내기

95년 3회

5.수평버팀대식 흙막이 공법의 시공순서를 보기에서 골라 쓰시오.(4점)

<보기>

(1)중앙부 흙파기

(2)규준대 대기

(3)흙파기

(4)널말뚝 박기

(5)띠장, 버팀대 대기

(6)받침기둥

줄파기 → (2.규준대 대기) → (4.널말뚝 박기) → (3.흙파기) → (6.받침기둥) → (5.띠장, 버팀대 대기) →

(1.중앙부 흙파기) →갓둘레 흙파기

줄파기 → (       ) → (       ) → (       ) →

(       ) → (       ) → (       ) →갓둘레 흙파기

10.철근 콘크리트 건물에서 마감공사의 경우 시공순서를 보기에서 골라 기호로 쓰시오.(4점)

<보기>

(가)창 출입구 : 섀시

(나)걸레받이 : 인조 대리석판

(다)징두리 : 인조 대리석판

(라)벽, 천정 : 회반죽 바름

(마)마루 : 비닐타일

(가)창 출입구 : 섀시 ▶(라)벽, 천정 : 회반죽 바름 ▶

(다)징두리 : 인조 대리석판 ▶(나)걸레받이 : 인조 대리석판▶(마)마루 : 비닐타일

12.일반적인 콘크리트 배합설계의 순서를 8가지로 나누어 쓰시오.(5점)

(1)소요강도의 결정 (2)배합강도 결정 (3)시멘트강도 결정 (4)물,시멘트비 결정 (5)슬럼프값 결정 (6)골재의 크기 결정(잔골재율 결정) (7)시방배합의 결정 (8)현장 배합의 결정

13.철골공사에 있어서 공장제작 작업과정을 순서대로 쓰시오.(4점)

<보기>

공작도 작성 → ( 가 ) → 형판뜨기 → ( 나 ) → 마아크 표시 → ( 다 ) → ( 라 ) → 가조립 → ( 마 ) → 도장

공작도 작성 →(가.원척도 작성) →형판뜨기 →(나.변형바로 잡기) →마아크 표시 →(다.절단 및 가공) →(라.구멍뚫기) →가조립 →(마.리벳팅 또는 본접합) →도장

14.일반적인 건축물의 철근 조립순서를 골라 쓰시오.(4점)

<보기>

(가)기둥철근  (나)기초철근

(다)보철근    (라)바닥철근

(마)계단철근  (바)벽철근

(나)기초철근 ▶(가)기둥철근 ▶(바)벽철근 ▶(다)보철근▶(라)바닥철근 ▶(마)계단철근

21.철골조 기둥공사의 작업 흐름도이다. 알맞은 번호를 보기에서 골라 채우시오.(4점)

현장 시공도 작성

↓

(1              )

↓

(2              )

↓

기둥 밑바닥 Leveling 조정

↓

세우기 기계준비

↓           ←부재반입

(3              )

↓

(4              )

↓

(5              )

↓          --------↴
(6              )        도    장

↓

완성       ←-------┘

(가)본접합 (나)세우기 검사 (다)앵커볼트 매입

(라)세우기 (마)중심내기 (바)접합부의 검사

(1)(마)중심내기

(2)(다)앵커볼트 매입

(3)(라)세우기

(4)(나)세우기 검사

(5)(가)본접합

(6)(바)접합부의 검사

96년 1회

1.다음 빈칸에 관리순서의 기본적인 단계를 쓰시오.(2점)

계획 ㅡ (  1  ) ㅡ (  2  ) ㅡ (  3  )

(1)Do (2)Check (3)Action

96년 2회

1.슬러리 월의 시공순서를 아래 보기에서 골라 쓰시오.(4점)

<보기>

(가)철근조립  (나)guide wall 설치  (다)철망삽입

(라)굴착      (마)트레미관 설치

엔드파이프                                         콘크리트         엔드파이프

(    1   )   → (    2   )   →    설치     →  (    4   )  →  (    5   ) →     타설     →     철거

↑              ↓          ↑

안정액         이수중 모래      (    3   )

설치     ←  제거

(1)(나)guide wall 설치  (2)(라)굴착  (3)(가)철근조립  (4)(다)철망삽입  (5)(마)트레미관 설치

4.철근 콘크리트 공사에서 콘크리트 타설순서를 번호로 쓰시오.(3점)

<보기>

(1)벽  (2)보  (3)기초  (4)계단  (5)기둥  (6)바닥판

(3)기초 ▶(5)기둥 ▶(1)벽 ▶(4)계단 ▶(2)보 ▶(6)바닥판

19.토류벽을 이용한 수직터파기 공법의 순서를 보기에서 골라 번호를 쓰시오.(4점)

<보기>

(1)앵커용보링  (2)엄지말뚝 박기  (3)인장시험

(4)띠장 설치   (5)앵커 그라우팅  (6)흙막이 벽관 설치

(2)엄지말뚝 박기 ▶(6)흙막이 벽관 설치 ▶(1)앵커용보링 ▶(5)앵커 그라우팅 ▶(4)띠장 설치 ▶(3)인장시험

96년 3회

2.철골세우기 공사의 시공순서를 보기에서 골라 쓰시오.(4점)

<보기>

(1)세우기          (2)현장리벳치기    (3)리벳검사

(4)앵커 볼트 매입  (5)볼트 가조임

(6)볼트 본조임      (7)변형 바로 잡기

(4)앵커 볼트 매입 ▶(1)세우기 ▶(5)볼트 가조임 ▶(7)변형 바로 잡기 ▶(6)볼트 본조임 ▶(2)현장리벳치기 ▶(3)리벳검사

96년 5회

3.CIP 공법을 이용한 제자리 콘크리트 말뚝지정의 시공순서를 보기에서 골라 기호로 스시오.(3점)

<보기>

(1)철근조립       (2)모르타르 주입용 PIPE 설치

(3)모르타르 주입  (4)자갈 다져 넣기

(1)철근조립 ▶(3)모르타르 주입 ▶(4)자갈 다져 넣기

▶(2)모르타르 주입용 PIPE 설치

5.시트(sheet)방수공법의 시공순서를 쓰시오.(3점)

바탕처리 ㅡ (   1   ) ㅡ 접착제칠 ㅡ (   2   ) ㅡ

(    3   )

(1)프라이머칠 (2)시트 붙이기 (3)마무리

13.프리패브 콘크리트 공사 작업순서를 보기에서 골라 선택하시오.(4점)

<보기>

(가)양생후 탈형  (나)개구부 프레임 설치  (다)표면마감

(라)철근, 철물류 삽입  (마)중간검사     (바)거푸집조립

베드 거푸집 청소 ㅡ ( 1 ) ㅡ ( 2 ) ㅡ ( 3 ) ㅡ 설비, 전기배관 ㅡ ( 4 ) ㅡ 콘크리트 타설  ㅡ ( 5 ) ㅡ ( 6 ) ㅡ 보수와 검사 ㅡ 야적

베드 거푸집 청소 ㅡ (1.거푸집조립) ㅡ (2.개구부 프레임 설치) ㅡ (3.철근, 철물류 삽입) ㅡ 설비, 전기배관 ㅡ (4.중간검사) ㅡ 콘크리트 타설  ㅡ (5.표면마감) ㅡ (6.양생후 탈형) ㅡ 보수와 검사 ㅡ 야적

19.pre-stressed concrete 중 post tension 공법의 시공순서를 보기에서 골라 기호로 쓰시오.(4점)

<보기>

(1)콘크리트 경화  (2)강현재 고정  (3)시이드(sheet)설치

(4)강현재 긴장    (5)콘크리트 타설  (6)그라우팅

(7)강현재 삽입

(3)시이드(sheet)설치 ▶(5)콘크리트 타설 ▶(1)콘크리트 경화 ▶(7)강현재 삽입 ▶(4)강현재 긴장 ▶(2)강현재 고정 ▶(6)그라우팅

97년 1회

10.지반의 내력이 큰 순서대로 기호들을 나열하시오.(4점)

<보기>

➀굳은 역암      ➁자갈섞인 점토  ➂모래  ➃자갈

➄모래섞인 점토  ➅편암

➀굳은 역암 ▶➅편암 ▶➃자갈 ▶➁자갈섞인 점토 ▶➄모래섞인 점토 ▶➂모래

11.다음은 철골공사의 리벳접합의 경우 현장작업 순서이다.( )에 알맞은 말을 넣으시오.(4점)

기초 주각부 기타 심먹매김 ㅡ (   가   ) ㅡ (   나   ) ㅡ 철골세우기 ㅡ (   다   ) ㅡ 변형 바로잡기 ㅡ (   라   ) ㅡ 접합부 검사 ㅡ 도장

기초 주각부 기타 심먹매김 ㅡ (가.앵커볼트 설치) ㅡ (나.기초상부고름질) ㅡ 철골세우기 ㅡ (다.가조립) ㅡ 변형 바로잡기 ㅡ (라.정조립) ㅡ 접합부 검사 ㅡ 도장

97년 2회

2.수평버팀대식 흙막이 시공순서를 쓰시오.(4점)

줄파기 ㅡ ( 가 ) ㅡ ( 나 ) ㅡ 흙파기 ㅡ ( 다 ) ㅡ ( 라 ) ㅡ 중앙부 흙파기 ㅡ 갓둘레 흙파기

줄파기 ㅡ (가.규준대 대기) ㅡ (나.널말뚝 박기) ㅡ 흙파기 ㅡ (다.받침기둥 박기) ㅡ (라.띠장,버팀대 대기) ㅡ 중앙부 흙파기 ㅡ 갓둘레 흙파기

5.건축공사의 콘크리트 타설순서를 골라 번호로 쓰시오.(4점)

<보기>

(가)보  (나)기둥  (다)바닥판 (라)계단  (마)벽  (바)기초

(바)기초 ▶(나)기둥 ▶(마)벽 ▶(라)계단 ▶(가)보 ▶(다)바닥판

97년 3회

3.표준관입순서를 3단계로 나누어 간략하게 쓰시오.(3점)

1.로드선단에 표준관입 시험용 셈플러 부착

2.로드 상단에 63.5kg 추를 75(76)cm높이에서 자유낙하.

3.지반에 샘플러가 30cm 관입하는데 필요한 타격횟수 N    치로 밀도 판별

20.회반죽 미장의 시공순서를 보기에서 골라 번호를 쓰시오.(4점)

<보기>

(1)재료조정 및 반죽     (2)초벌바름     (3)재벌바름

(4)마무리 및 보양       (5)바탕처리     (6)수염붙이기

(7)고름질 및 덧먹임     (8)정벌바름

(5)바탕처리 ▶(1)재료조정 및 반죽 ▶(6)수염붙이기 ▶(2)초벌바름 ▶(7)고름질 및 덧먹임 ▶(3)재벌바름 ▶(8)정벌바름 ▶(4)마무리 및 보양

97년 4회

1.흙은 일반적으로 물을 포함하고 있으며 그 함수량의 변화에 따라 아래와 같이 그 성질이 변화한다. (  )속에 알맞은 표현을 쓰시오.(2점)

전건상태 ㅡ (  ➀  ) ㅡ 소성상태 ㅡ (  ➁  ) ㅡ 질퍽한 액성의 상태

전건상태 ㅡ (➀.소성한계) ㅡ 소성상태 ㅡ (➁.액성한계) ㅡ 질퍽한 액성의 상태

11.R.C조 일반건축물 1개층의 시공순서를 보기에서 골라 기호로 쓰시오.(5점)

<보기>

(가)기초옆, 지중보 거푸집 설치   (나)보의 철근 배근

(다)기둥철근 배근

(라)보밑창판, 옆판 밎 바닥판 거푸집 설치

(마)바닥판 철근 배근

(바)기초판 철근배근, 지중보 철근배근

(사)기초판(지하실바닥, 지중보) 콘크리트 타설

(아)기둥, 벽, 보, 바닥판 콘크리트 타설

(자)기둥철근을 기초에 정착

(차)벽의 철근배근

(카)기둥거푸집, 벽한쪽 거푸집 설치

(타)벽의 딴편 거푸집 설치

(가)기초옆, 지중보 거푸집 설치 ▶(바)기초판 철근배근, 지중보 철근배근 ▶(자)기둥철근을 기초에 정착 ▶(사)기초판(지하실바닥, 지중보) 콘크리트 타설 ▶(다)기둥철근 배근 ▶(카)기둥거푸집, 벽한쪽 거푸집 설치 ▶(차)벽의 철근배근 ▶(타)벽의 딴편 거푸집 설치 ▶(라)보밑창판, 옆판 밎 바닥판 거푸집 설치 ▶(나)보의 철근 배근 ▶(마)바닥판 철근 배근 ▶(아)기둥, 벽, 보, 바닥판 콘크리트 타설

13.철골 용접과정에 따른 검사순서를 스고, 각 검사단계의 검사항목을 보기에서 골라 번호로 스시오.(3점)

<보기>

(가)트임새 모양  (나)전류      (다)침투수압 (라)운봉

(마)모아대기법   (바)외관판단 (사)구속     (아)용접봉

(자)초음파 검사

(가)용접착수전: 가, 마, 사

(나)용접작업중: 나, 라, 마

(다)용접완료후: 다, 바, 자

22.연결재 또는 당겨매기식 흙막이공법의 시공순서를 다음 보기에서 골라 기호로 쓰시오.(3점)

<보기>

➀로우프 당겨매기 ➁말뚝상부 띠장(ㄱ자형강) ➂널말뚝

➃흙파기          ➄어미말뚝

➄어미말뚝 ▶➂널말뚝 ▶➁말뚝상부 띠장(ㄱ자형강) ▶

➀로우프 당겨매기 ▶➃흙파기

97년 5회

2.다음 보기 중 꽂이식 진동기의 효과가 가장 잘 발휘될 수 있는 것부터 순서대로 번호를 쓰시오.

<보기>

(1)빈배합 묽은 비빔  (2)부배합 묽은 비빔  (3)빈배합 된비빔

(3)빈배합 된비빔 ▶(1)빈배합 묽은 비빔 ▶(2)부배합 묽은 비빔

14.97년 4회 13번문데(동일)

15.경량철골 반자틀 시공순서를 천장판 시공까지 쓰시오.(4점)

인서트 매입 ㅡ (  1  ) ㅡ (  2  ) ㅡ (  3  ) ㅡ

(  4  ) ㅡ (  5  )

19.철골공사에서 리벳접합의 현장작업순서를 다음 보기에서 골라쓰시오.(4점)

<보기>

(가)접합부 검사   (나)변형바로잡기  (다)앵커볼트 설치

(라)도장          (마)철골세우기    (바)정조립(본조립)

(사)기초주각부 기타 심먹매김        (아)가조립

(자)기초상부고름질   (차)리벳접합

(사)기초주각부 기타 심먹매김 ▶(다)앵커볼트 설치 ▶(자)기초상부고름질 ▶(마)철골세우기 ▶(아)가조립 ▶(나)변형바로잡기 ▶(바)정조립(본조립) ▶(차)리벳접합 ▶(가)접합부 검사(라)도장