1 .설계도서 포함내용 4가지를 쓰시오

설계도서는 도면,산출,을 시방, 기술계산,했다.
설계도면, 산출,내역서, 시방서,기술계산서

2 .비상주감리원 업무 3가지 (17년)
비상주감리원이  설,설,기,다 정,상에서

(1) 설계도서 등의 검토

(2) 중요한 설계변경에 대한 기술검토

(3) 기성 및 준공 검사

(4)정기적(월별,분기)현장시공상태점검,확인평가기술지도

(5)상주감리원이수행하지못하는현장조사분석,시공상의문제점에대한기술검토와미원사항에대한현지조사및해결방안

3. 감리용역 착수단계에서 감리업자는 착수신고서를 제출받아 발주자의 승인을 받아야 한다. 착수신고서 서류4가지는

착수신고서는 —산.수.배.경.이 조.타.

(1) 감리비 산출 내역서  (2) 감리업무 수행 계획서

(3) 상주,비상주 감리원배치 계획서와 감리원 경력 확인서

(4) 감리원 조직 구성내용과 감리원별 투입기간과 담당업무

4. 감리원의 감리업무에 관련하여 ( )안에 들어갈 내용은?

감리원은(시공계획서)에 따른 일정단계의 작업이 완료되면 공사업자로부터 검사요청서를 제출받아 그 시공상태를 확인 검사하는 것을 원칙으로 하고, 가능한한 공사의 효율적인 추진을 위하여 (시공과정)에서 수시 입회하여 확인,검사 하도록 한다.

5. 최종감리는 (자재,품질,안전,추진,)실적과—감리용역,개요
(1) 주요기자재 사용실적  (2) 품질관리 실적

(3) 안전관리 실적       (4) 공사추진 실적현황

(5) 공사 및 감리용역 개요

6 .감리원의 시공상세도 승인전 확인 사항 5가지 (16년)
시공 상세도 승인전 ---실제,계산의, 안전성,

(1)실제시공 가능 여부      (2)계산의 정확성

(3)안전성의 확보 여부

(4)현장의시공기술자가 명확하게 이해하고있는지

(5)도면에표시곤란한내용이 시공시유의사항으로 작성되었는지

7. 검사 업무 지침은 어떤 내용들 포함?

검사업무지침은 —기기,체크,빈도,가 세부,절차,에 있다.
검사기기,검사 체크리스트, 검사빈도, 검사절차,세부공종,

8. 안전관리 결과 보고서의 검토 5가지
보건,교육,을 관리,하면 산재,및재해,가 없다.  (16년)

(1)안전보건 관리체제  (2)안전교육 실적표

(3)안전관리 조직표    (4)산재요양 신청서 사본

(5) 재해발생 현황

9. 안전관리 계획서 검토 5가지

재해,사고,전 외부, 개인,교육,을 세워라.

(1)외부 안전진단 실시 세부계획

(2)개인 보호구 지급계획

(3)안전사고 발생시 처리계획

(4)재해우려시기의 세부안전계획

(5)안전교육 세부계획

10 .설계변경이 필요한 경우 첨부해야 할 것 5가지 (17)
설계변경은 ---(도면,의개요,)를 보고 (수량),(계산)을 (설명)

(1) 설계변경 도면, (2) 설계변경 개요서   (3) 수량산출 조서  (4) 계산서 등      (4) 설계 설명서,

11.시운전 완료 후 발주자에게 인계하여야 할 것 3가지
발주자인계는 운전(개시,지침) --실가동,시험,점검     (16년)

(1)운전개시, 가동절차 및 방법

(2)운전지침                         (3)실가동 diagram

(4)시험 성적서                     (5)점검항목 점검표

12 .평감리원의 해당 공사에 대한 기술지도사항 3가지

평감리원-품질,안전,공사관리
(1)품질관리   (2)안전관리 (3)공사관리

13 .시공감리의 순서
:발주자 - 공사업자 - 감리원

14시방서의종류에서모든공사에공통되는사항이기록된시방서는 : 표준시방서

15. 시방서의 종류 : 표준시방서, 전문시방서, 공사시방서

16 .설계감리용역 계약문서에 포함되는 서류 4가지
일반,특수,입찰,계약서

(1)설계감리용역계약 일반조건 (2)설계감리용역계약 특수조건 (3)설계감리용역 입찰유의서   (4)계약서

17 .시공계획서의 검토 확인에 관한 내용이다. (  )답하시오.
:감리원은 공사업자가 작성 제출한 시공계획서를 공사 시작일로부터(30일)이내에 제출받아 이를 검토하여 (7일)이내에 승인하여 시공하도록

18. 전력 시설물의 설치,보수 공사의 계획,조사 및 설계가 법에 따른 전력기술기준과 관계법령에 따라 적절하게 시행되도록 관리하는 것을 무엇이라 하는가?          : 설계감리

19 .감리원은 공사업자로부터 전체 실시공정표에 따르는 월간, 주간 상세공정표를 사전에 제출받아 검토 확인 하여야 한다. ( ) 답을 넣으시오.
(1)월간 상세공정표: 작업 착수 (7일) 전 제출.
(2)주간 상세공정표: 작업 착수 (4일) 전 제출.

20. 감리원 공사현장에서 감리업무수행상 필요한 서식을 비치하고 기록보간 하여야 한다. 해당서류 5가지는

감리서식은 안전사고전 검사지시해야 민원이 없다.

(1) 안전관리 점검표   (2) 사고 보고서

(3) 검사 요청서       (4) 지시부   (5) 민원 처리부

21. 설계감리원은 다음 각 호의 문서를 비치하고 승인받아 기록하여 발주자에게 제출해야한다.전자매체로 제출할수 있다.

근무, 일지, 추진, 기록, 지시, (17년)

(1) 근무 상황부  (2) 설계감리 일지  (3) 설계감리 추진현황

(4) 설계감리 기록부         (5)설계감리 지시부