1. 흙막이는 토질, 지하출수, 기초높이 등에 따라 그 공법을 달리하는데 흙막이의 형식을 4     가지만 쓰시오. [4점]

2. 다음은 조적공사 시공시 유의하여야 할 점이다. 빈칸을 채우시오. [4점]

가. 한냉기 공가(   )에서 모르타프 온도가 4-(   )°C이내가 되도록 유지함.

나. 벽돌 표면온도는 (   )°C 이하가 되지 않도록 관리함.

다. 가로, 세로의 줄눈나비는 (   )cm를 표준으로 함.

라. 모르타르용 모래는 (   )mm 체에 100% 통과하는 적당한 입도일 것.

3. 블록구조의 외부벽체에 대한 직접 방수처리 방법 3가지를 쓰시오. [3점]

4. 지하구조물 축조시 인접구조물의 피해를 막기 위해 실시하는 언더피닝(under pinning)      공법의 종류 4가지를 쓰시오. [4점]

5. 시멘트 모르터 미장공사에서 채용되는 부위별 미장시 합계 두께를 mm 단위로 쓰시오.      (콘크리트 바닥을 기준으로 함) [4점]

6. 철골공사의 접합에 사용되는 고장력 볼트의 장점을 4가지 쓰시오.

7. 계약제도상의 보증금 3가지를 쓰시오. [3점]

8. 다음 그림과 같은 창고를 시멘트 벽돌로 신축하고자 할때 벽돌 쌓기량(매)과 내외벽 시     멘트 미장할 때 미장 면적을 구하시오. [8점]

(단, 1) 벽두께는 외벽 1.5B 쌓기, 간막이벽 1.0B 쌓기로 하고 벽높이는 안팎 공히         3.6m로 가정하며, 벽돌은 표준형 (190×90×57)으로 할증율은 5%임.

2) 창문틀 규격은 1/D : 2.2m×2.4m, 2/D : 0.9m×2.4m, 3/D : 0.9m×2.1m

1/W : 1.8m×1.2m, 2/W : 1.2m×1.2m

9. 다음 주어진 내용과 보기 중 상호 연결성이 높은 것을 찾아 기호로 쓰시오. [5점]

[보기]

① 오토클레이브          ② 길모어            ③ 슈미트햄머

④ 르샤틀리에            ⑤표준체

가. 응결시험 (  )             나. 안정도 시험 (  )

다. 강도시험 (  )             라. 비중시험 (  )

마. 분말도 시험 (  )

10. 슬러리윌(Slurry wall)공법에 대하여 서술하고, Guide wall의 설치목적을 2가지 쓰시오.      [4점]

가. 슬러리월공법 :

나. Guide wall 설치목적 :

11. 무리말뚝 기초공사에 관한 사항이다. 일반적인 시공순서를 보기에서 골라 기호로 쓰시      오. [4점]

[보기]

㉮ 수평규준틀 설치                  ㉯ 중앙부말뚝박기

㉰ 가장자리말뚝박기                 ㉱ 말뚝중심잡기

㉲ 표토걷어내기                     ㉳ 말뚝머리정리

① 지내력 증가를 고려하는 경우 :

② 기계 설치를 고려하는 경우

12. 토공장비 선정시 고려해야 할 기본적인 요소 4가지를 기술하시오. [4점]

13. BOT방식(Build-Operate-Transfer-Contract)을 설명하시오.[3점]

14. 대형 시스템 중에서 갱폼(Gang form)의 장, 단점을 각각 2가지씩 쓰시오. [4점]

가. 장점 :

나. 단점 :

15. 철골조 내화피복의 시공공법을 4자기를 들고 설명하시오. [4점]

16. 다음 데이터를 이용하여 공기를 계산한 결과 지정공기보다 6일이 지연되었다. 공기를       조정하여 6일의 공기를 단축한 공정표를 작성하고, 총공사 금액을 산출하시오. [8점]

작업명	선행작업	정상(Normal)		특급(Crash)		비고
		공기(일)	공비(원)	공기(일)	공비(원)	단축된 공정표에서 주공선은 굵은 선으로 표기하고 각 결합점 에서는 LST 작업명 LFT EFT 작업일수 로 표기한다.
A	-	3	3,000	3	3,000
B	A	5	5,000	3	7,000
C	A	6	9,000	4	12,000
D	A	7	6,000	4	15,000
E	B	4	8,000	3	8,500
F	B	10	15,000	6	19,000
G	C,E	8	6,000	5	12,000
H	D	9	10,000	7	18,000
I	F,G,H	2	4,000	2	3,000

i

j

EST

17. 바닥 미장면적이 1000㎡일때, 1일 10인 작업시 작업 소요일을 구하시오. [3점]

(단, 아래와 같은 품셈을 기준으로 하며 계산과정을 쓰시오.)

바닥 미장 품셈(㎡당)

구분	단위	수량
미장공	인	0.05

미장공 1인당 1일 품셈 :

작업소요일 :

18. 품질관리의 순서를 보기에서 골라 번호를 순서대로 나열하시오. [4점]

[보기]

㉮ 작업표준   ㉯ 품질표준   ㉰ 품질조사   ㉱ 수정조치의 조사   ㉲ 수정조치

19. 철근콘크리트 부재의 이어치기는 수직, 수평, 직각의 형태로 구분된다. 주어진 부재의       이어치기를 이들 3형태에 맞춰 번호를 답하시오. [3점]

[보기]

① 보     ② 기둥     ③ 슬래브     ④ 벽     ⑤ 아치

가. 수직 (     )       나. 수평 (     )       다. 축에 직각 (     )

20. 철골공사의 공장제작이 완료된 후에 현장 세우기를 하여야 하는데 현장 시공을 위한 철      골 시공도에 삽입해야 할 중요한 사항을 2가지 기록하시오. [4점]

21. 다음 물음에 답하시오.

가. 차량하중을 받는 콘크리트 바닥판의 시공줄눈을 보강하기 위하여 아래의 단면도와          같이 Slip bar를 60cm간격으로 설치하려 한다. 이때 Slip bar의 한 부분은 콘크리          트속에 고정시키고 나머지 부분은 고정되지 않게 처리한다. 그 처리방법을 쓰시            오. [4점]

나. 아래의 단면도와 같이 콘크리트 바닥판의 수평단면이 변하는 ⓐ의 위치에 설치되는         줄눈의 명칭을 쓰시오. 또한 이 콘크리트 줄눈에서 용접철망을 처리하는 방법을 보         기에서 골라 기호로 쓰시오.

[보기]

① 줄눈을 관통시켜 용접철망을 연속해서 설치한다.

② 줄눈의 좌우 양측으로 50cm 정도 떨어진 지점까지만 용접철망을 설치하여 줄눈을         관통 시키지 않는다.

22. 콘크리트 배부의 철근이 부식되기 위해 필요한 3요소는 무엇이며, 이에 대한 대책은 이      들 3요소를 억제하거나 콘크리트 중의로의 침투를 막으면 된다. 이를 위한 방법 3가지      는 무엇인가? [6점]

23. 철골구조물에서 보 및 기둥에서 H형강이 많이 사용되는데 Long Span에서는 기성품인      Rolled 형강을 사용할 수 없을 정도의 큰 단면의 부재가 필요하게 된다. 이 경우 공장      에서 두꺼운 철강판을 절단하여 소요크기로 용접제작하여 현장제작(Built up) 형강을       사용하게 되는데 H-1200×500×25×100부재(ℓ=20m) 20개의 철강판 중량은 얼마(ton)      인가? (단, 철강의 비중은 7.85로 한다.) (4점)

24. 콘크리트 블록벽 쌓기에 수평줄눈에 묻혀 쌓는 Wire mesh의 사용목적을 2가지 쓰시       오. [2점]