번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
6.01 a 6.02 a	동상방지층 동상방지층 포설 및 다짐 보조기층 보조기층 포설 및 다짐	㎥ ㎥	1.포 설 2.다 짐 ※보조기층 참조 3.살 수 4.부설인부 1. 포 설 - 장비 : 그레이더 - 거리 : D=50m - 계수 및 효율 : f=C/L, E=0.6 2. 다 짐 - 장 비 : 자주식 진동로라 10TON, - 계수 및 효율 : f=1, E=0.6 타이어로라(8-15TON) - 계수 및 효율 : f=1, E=0.6 3. 살 수(물탱크 5500ℓ) - 효율 : E=0.9 - 소요함수비 : 7% 4. 부설인부 - 특별인부 : 0.2인×0.1/(100×h) - 보통인부 : 4.0인×0.1/(100×h) (h=포설두께)	품셈 11-10, 11-12, 12-5참조 품셈 11-10 참조 품셈 11-12 참조 품셈 12-5 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
b	보조기층 포설 및 다짐 (백호우 0.7㎥)	㎥	1. 포설 - 장비 : 백호우 0.7㎥ - 계수 및 효율 : f=C/L, E=0.65 2. 다 짐 - 장 비 : 자주식 진동로라 10TON, 계수 및 효율 : f=1, E=0.6 - 장 비 : 타이어로라(8-15TON) 계수 및 효율 : f=1, E=0.4 3. 살 수(물탱크 5500ℓ) - 효율 : E=0.9 4. 부설인부(10%반영) - 특별인부 : 0.2인×0.1/20 - 보통인부 : 4.0인×0.1/20	품셈 11-3 참조 품셈 11-12 참조 품셈 12-5 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
6.03 a	린콘크리트 콘크리트생산 및 운반	㎥	1. 콘크리트 배합비(할증) - 시멘트 2% - 모 래 10% - 자 갈 3% 2. 모래 자갈 비율 (콘크리트 배합표에 의하여 적용) - 모 래 : 1600㎏/㎥ - 자 갈 : 1700㎏/㎥ 3. 시멘트 구입 및 운반 : 별도 계상 4. 모래 구입 및 운반 : 별도 계상 5. 쇄석운반(D=40㎜) : 별도계상 6. 배치플랜트 사용료(120㎥/hr) - 보통인부 : 3인 7. 골재투입 - 장 비 : 페이로다(1.72㎥ 타이어) - 계수 및 효율 : f=1.0, E=0.6 8. 물운반비(물탱크 5500ℓ) 9. 빈배합 콘크리트 운반 - 장 비 : 덤프트럭 15TON - 거 리 : B/P～현장	품셈 1-9 참조 품셈 1-10 참조 품셈 11-25 참조 품셈 11-5 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
b	린콘크리트포설 다짐 (기계포설)	㎥	1. 포설 N=플랜트작업능력/작업능력 - 장 비 : 아스팔트 페이버 N(대) 2. 다짐 - 매케덤로라 10-12TON - N(대) - 타이어로라 8-15TON - N(대) - 탠덤뎀로라 5-8TON - N(대) 3. 부설 - 콘크리트공 : 2인×N조 - 보통인부 : 2.8인×N조 4. 비닐 - 우기 및 하절기 포설기간의 1/2(10회)	품셈 11-17 참조 품셈 11-12 참조 품셈 12-16 참조 ※ 1일 포설량에 의하여 품적용
6.04 a	콘크리트 생산 슬래브	㎥	1. 배합비(할증) - 시멘트 : 2% - 모 래 : 10% - 자갈(쇄석 Φ 32) : 3% - AE제 : 2% 2. 모래자갈 비율 (콘크리트 배합표에 의하여 적용) - 모 래 : 1600Kg/㎤ - 자 갈 : 1700Kg/㎤ 3. 시멘트 구입 및 운반 : 별도계상 4. 모래 구입 및 운반 : 별도계상 5. 쇄석운반 : 별도계상 6. 콘크리트 배치플랜트 사용료(120㎥/hr) - 보통인부 : 3인 7. 골재투입 - 장 비 : 페이로다 1.72㎥(타이어) - 계수 및 효율 : f=1.0, E=0.75 8. 물운반(물탱크 5500ℓ)

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
6.05 a	큰크리트 운반 덤프트럭	㎥	- 운반장비 : 덤프 15TON - 거 리 : B/P～현장 - 계수 및 효율 : E=0.95	품셈 11-26 참조
b	콘크리트운반 믹서트럭	㎥	- 운반장비 : 콘크리크믹서트럭 6.0㎥ - 거 리 : B/P～현장 - 계수 및 효율 : E=0.95	품셈 11-26 참조
6.06 a a-1	콘크리트 포장 1차로 포설 기계포설 무근1차로 포장 (T=30cm)	㎥	1. 콘크리트 구입 및 생산 - 현장도착도 2. 스프레더 3. 슬리폼 페이버 - 100HP 4. 조면마무리 및 양생제 살포 - 폭 : 4.5m - 살포 : 기계자체 살포 5. 비닐 : 2겹 - 우기 및 하절기 포설기간의 1/2 (10회) 6. 포설인력 - 콘크리트공 : 2인 - 특별인부 : 5인 - 포 장 공 : 2.8인 - 인 부 : 2.8인 8. 기계 펴고르기 - 백호우 0.4㎥ - 계수 및 효율 : f=1, E=0.8	품셈 11-27 참조 품셈 12-16 참조 ※ 1일 포설량에 의하여 품 적용

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
a-2	콘크리트 포장 무근2차로 포설 (T=30cm)	㎥	1. 콘크리트 생산 2. 운반 3. 스프레더 4. 슬리폼 페이버 - 장 비 : 페이버(215HP) 5. 조면마무리 및 양생제 살포 - 폭 : 7.95m - 살포 : 기계자체 살포 6. 비닐 : 2겹 7. 포설인력 - 콘크리트공 : 2인 - 특별인부 : 5인 - 포 장 공 : 2.8인 - 인 부 : 2.8인 8. 기계 펴고르기 - 백호우 0.4m3 - 계수 및 효율 : f=1, E=0.8	품셈 11-27 참조 품셈 12-16 참조 ※ 1일 포설량에 의하여 품 적용
a-3	중분대 기초 (T=20cm)	㎥	1. 포설인력(줄눈,포설품의 2/3 적용) - 포설공 : 3.35인 - 인 부 : 2.59인 - 기구손료 : 인건비의 5% - 잡재료비 : 인건비의 2% 2. 양생 - 양생공 : 0.004인 - 기구손료 : 인건비의 5%	품셈 12-16 참조 품셈 12-17 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
b b-1 b-2 b-3 b-4	인력포설 교량접속 및완충슬라브 (T=40cm) 연결로 접속 및 암거보강 부체도로 연결로 길어깨(인력)	㎥	1. 포설인력 - 포설공 : 4.85인 - 인 부 : 2.59인 - 기구손료 : 인건비의 5% - 잡재료비 : 인건비의 2% 2. 콘크리트 양생 - 양생공 : 0.004인 - 기구손료 : 인건비의 5%	품셈 12-16 참조 ※ 포장두께에 의하여 품 적용 품셈 12-17 참조
6.07 a	철근가공 철근가공(간단)	ton	- 철 근 : 별도계상 - 철근공 : 1.2인 - 인 부 : 0.7인	품셈 6-2 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
c	와이어메쉬 설치공	㎡	1. 재료비 - 단위보정계수 : 1.03(3%할증) 2. 운반비 - 거 리 : 15m - 인 부 : 창고 2인 운반 6인(3개조) 트럭상차 2인 3. 와이어메쉬 바닥깔기 - 특별인부 : 0.012인 4. 결속선 : R=0.9㎜ 5. 고철대(3%)	※ 농로포장시 Wire Mesh 삭제 품셈 9-1 참조
d	스페이샤 설치	㎡	1. 재료비 2. 설치비 : 재료비의 5%
6.08	비닐깔기	㎡	1. 자재대 (2겹 P.E 필름 0.1 × 1.8 × 9.1) 2. 설치비 - 인부 0.004인	품셈 12-17 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
6.09	콘크리트포장용 거푸집 거푸집 합판 4회	㎡	※거푸집 1회 참조(재료비:40.1% , 노무비:40%) 1. 합판 : 12㎜ 2. 각재(육송) 3. 사용고재 4. 철선 : #8 5. 못 : 75m/m 6. 박리제 : 경유 7. 형틀목공 : 0.30인 8. 인부 : 0.25인	품셈 6-3 참조
6.10 a a-1	줄눈설치공 세로줄눈 형식 1-1	m	1. 타이바 D=16㎜ 2. 콘크리트 절단(깊이 75㎜) 3. BAKUP ROD(D=8㎜) 4. 프라이마(상온형) 5. 충진제(상온형) 6. 설치비 - 작업반장 : 0.004인 - 특별인부 : 0.0132인 - 보통인부 : 0.0381인	품셈 12-18 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
a-2	세로줄눈 형식 1-3	m	1. 타이바 - D = 16㎜ - 거 리 : 800㎜ - 간 격 : 750㎜ - 도장비 : 녹막이 1회 + 조합 2회 2. 콘크리트 절단 - 깊이 25㎜ 3. BACKUP ROD - D=8㎜ 스치로폴 4. 프라이머(상온형) 5. 충진제(상온형) 6. 설치비 - 작업반장 : 0.004인 - 특별인부 : 0.0132인 - 보통인부 : 0.0381인	품셈 12-18 참조
b b-1	가로줄눈 형식 2-1, 2	m	1. 줄눈자재비 2. 줄눈운반비 - 공장 - 현장창고 - 적재 적하비(인력) 운반 : 6인(2인 1조) 트럭위 : 2인 - 운반비(현장창고-현장 덤프10.5TON) 3. ANCHOR PIN - 철판(0.05×0.1×0.0005) 4. 콘크리트 절단 - 깊이 75㎜ 5. BACKUP ROD - D=8㎜ 6. 프라이머(상온형) 7. 충진제(상온형) 8. 설치비 - 작업반장 : 0.004인 - 특별인부 : 0.0132인 - 보통인부 : 0.0381인	품셈 12-18 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
b-2	가로수축 줄눈 형식 2-2	m	- 줄눈단위수량(주행선=4.575, 추월선=3.925) 1. 줄눈운반 : 공장 - 현장창고 - 적재, 적하비(인력) 운반 : 6인(2인 1개소 : 1조 운반) 트럭위 : 2인 2. 설치비 - 작업반장 : 0.004인 - 특별인부 : 0.0132인 - 보통인부 : 0.0381인	품셈 12-18 참조
c	팽창줄눈 (2차선) 형식3-1, 3-2	m	- 줄눈단위수량(주행선=4.575, 추월선=3.925) 1. 줄눈운반(현장창고- 현장) 2. DOWEL CAP(D35㎜ L=95㎜ PVC P.PE) 3. ANCHOR PIN 4. 채움재(스치로폴 T=20㎜) 5. 강재거푸집 설치 및 해체 6. 설치비 - 작업반장 : 0.004인 - 특별인부 : 0.0132인 - 보통인부 : 0.0381인	품셈 12-18 참조
6.11 a b	스티로폴 줄눈 설치공 - 스치로폴줄눈 T=10m/m - 스치로폴줄눈 T=20m/m	m m	1. 재료비: (1.8(m)×0.9(m)×10(m/m) 2. 설치비: 0.01인 1. 재료비: (1.8(m)×0.9(m)×20(m/m) 2. 설치비: 0.01인
6.12	부체도로용 줄눈	m	1. 콘크리트 절단 (T=25m/m) 2. BACKUP ROD (D=8㎜) 3. 프라이머(상온형) 4. 충진제(상온형) 5. 설치비 - 작업반장 : 0.004인 - 특별인부 : 0.0132인 - 보통인부 : 0.0381인	품셈 12-18 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
6.13	콘크리트 포장연마	㎡	- 장비 : 디젤엔진 70HP: 1대, 물 5500ℓ - 기계공 : 1인 - 보통인부 : 1인 - 청소비 : 보통인부 : 0.008인 - 기타기구 손료 : 인건비의 5% - DIAMOND SAW BLADE (D=12inch, T=3.2m/m)
6.14	프라임 코팅(MC-1)	㎡	1. ASPHALT 용해비 : (75ℓ/a) - 용해비중 경유 : 26.0ℓ - 특별인부 : 0.26인 - 보통인부 : 0.26인 2. ASPHALT 살포비 : 3800ℓ 3. 인건비 - 특별인부 : 0.6인/1000×0.75 - 보통인부 : 0.3인/1000×0.75 4. 청소비 - 보통인부 : 0.2인	품셈 12-29 참조 - RSC-3일 경우 용해비 삭제 품셈 11-16 참조 품셈 12-11 참조
6.15	택 코 팅	㎡	1. ASPHALT 살포비 : 3800ℓ (30ℓ/a) 2. 인건비 - 특별인부 : 0.6인/1000×0.3 - 보통인부 : 0.3인/1000×0.3 3. 잡재료비 : 인건비의 5% 4. 아스팔트 구입 및 운반 5. 청소비 - 보통인부 : 0.2인	품셈 12-11 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
6.16	아스콘 기층 포설 및 다짐	㎡	1. 포설두께 : 7.5～10cm 기준, 포설폭 : 3.5m 2. 살 수 - 물탱크 : 5,500ℓ - 1일 2회 급수 - t1 = 10, t2 = (L=0.5km, V=25km), t4 = 5 3. 다 짐 N=아스팔트플랜트 생산능력/작업능력 - 머케팀로라(10-12TON) : N(대) E=0.55 - 타이어로라(8-15TON) : N(대) E=0.45 - 탐뎀로라(10-14TON) : N(대) E=0.45	품셈 11-17 참조 품셈 11-12 참조
6.17	아스콘 중간층 포설 및 다짐	㎡	1. 포설비 - 폭 : W = 3.5m, E = 0.8 2. 구성인원 - 포장공 : 8인 - 인 부 : 4인 3. 전압 - 장비 : 머케덤로울러(8-10TON) : N(대) E=0.55 타이어로라(8-15TON) : N(대) E=0.45 탄뎀로라(10-14TON) : N(대) E=0.45 - 물탱크 사용료(5500ℓ) : t1 = 10, t2 = (L=0.5km, V=25km), t4 = 5	품셈 12-13 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
6.18	아스콘 표층 포설 및 다짐	㎡	1. 포설비 - 폭 : W = 3.5m, E = 0.8 2. 구성인원 - 포장공 : 8인 - 인 부 : 4인 3. 전압 - 장비 : 머케덤로울러(8-10TON) : N(대) E=0.55 타이어로라(8-15TON) : N(대) E=0.45 탄뎀로라(10-14TON) : N(대) E=0.45 - 물탱크 사용료(5500ℓ) : t1 = 10, t2 = (L=0.5km, V=25km), t4 = 5	품셈 11-17 참조 품셈 12-13 참조 품셈 11-12 참조
6.19	길어깨포장 (포설 및 다짐)	㎡	본선포장과 동일
6.20	교면포장 포설 및 다짐	㎡	1. 아스콘 구입비 2. 교면보강 (BONIFIBER) - 재료비 및 투입인건비 3. 포설 및 다짐 - 표층 아스콘 포장 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
6.21 a	크랏샤 설치공 150TON	식	* 아스팔트 플랜트 100TON 이상 1/2 적용 1. 부지임대료 - 부지면적 : 5,000㎡ - 설치기간 : 실가동시간+설치,해체기간 - 토지가격(기준 공시지가)의 연 10% 2. 부지조성 - 인부 : 150인 - 잡비 : 불도우져 19TON 탄뎀로라(6-8TON) 그레이다(3.6M) 3. 크랏샤 조립 - 기계공 : 45인 - 비계공 : 36인 - 인 부 : 60인 - 트럭크레인(10TON) 4. 크랏샤 운반 - TRAILER 20TON 4대/기당 5. 골재덮개 천막설치	품셈 12-12 참조
b	크랏샤 철거공 150TON	식	* 아스팔트 플랜트 100TON 이상 1/2 적용 1. 크럇샤 해체 - 기계공 : 30인 - 비계공 : 25인 - 인 부 : 43인 - 트럭크레인(10TON) 2. 크럇샤 운반 -TRAILER 20TON 4대/기당	품셈 12-12 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
6.22	포장팻칭	㎡	1. 노면절삭 - 노면파쇄기 (1.0m) 2. 절삭부산물 처리 - 집적 및 청소 특수인부 1인 보통인부 6인 - 적사(타이어 로오다 1.7㎥) - 운반(덤프트럭 15TON) 3. 택코팅 4. 표층 포설 및 다짐 (T=5Cm)	품셈 11-20 참조
6.23 a b	노면절삭 소파보수용 차로용	㎡	1. 노면파쇄기(1.0m) - W=1.0m, V=60m/hr, E=0.65 - W=2.0m,V=200m/hr, E=0.65 2. 작업부산물 처리 - 집적 및 청소 특수인부 1인 보통인부 6인 - 적사(타이어 로오다 1.7㎥) - 운반(덤프트럭 15TON) 3. 택코팅 : 1회 (30ℓ/a) 4. 표층포설 : 소규모 인력포설 5. 아스콘 재료비 (현장도착도)	품셈 12-28 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
6.24 a	콘크리트 배치플랜트 콘크리트 배치플랜트 설치공 (120㎥/Hr)	식	1. 부지임대료 - 부지면적 : 8500M2 - 설치기간 : 실가동기간 + 설치해체기간 - 임 대 료 : 토지가격(기준 공시지가)의 연 10% 2. 부지정지비 - 보통인부 : 160인 - 불도저(19Ton) : 104Hr (평탄한곳제외, 경사 10。이하) - 탠덤롤러 (5-8Ton) : 28 Hr - 그레이더 (3.6m) : 12 Hr 3. 콘크리트플랜트 조립(사이로포함 설치철거의 55%) - 기계공 : 84.7인 - 비계공 : 118.8인 - 인 부 : 80.3인 - 플랜트전공 : 62.7인 - 크레인 (50TON) : 110Hr 4. 골재 저치장 설치 (900m3) - 형틀목공 : 16.8인 - 인 부 : 42.4인 - 원 목 : 14.4㎥ - 판 재 : 10.7㎥ - 잡재료비 : 인건비의 2% 5. 플랜트 운반 - 인건비 : 비계공 : 2인 인 부 : 2인 - TRUCK CRANE : 15TON - 운반비 : 트레일러 20TON : 4대	품셈 12-14 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
b	콘크리트 배치플랜트 철거 (120㎥/Hr)	식	1. 철 거 (설치철거의 45%) - 기계공 : 69.3인 - 비계공 : 97.2인 - 인 부 : 65.7인 - 플랜트전공 : 51.3인 - 크레인 (50TON) : 90Hr 2. 운 반 PLANT 1기당 트레일러 20TON : 4대 - 인건비 : 비계공 2인 인 부 2인 3. 적재,적하 : TRUCK CRAIN 15TON	품셈 12-14 참조
6.25 a	아스팔트 콘크리트 플랜트 설치	식	1. 부지임대료 - 부지면적 : 10000M2 - 설치기간 : 실가동기간 + 설치해체기간 - 임 대 료 : 토지가격(기준 공시지가)의 연 10% 2. 부지정지비 - 부지정지비 : 300인 - 불도저 : 152Hr (평탄한곳제외 경사 10。이하) - 탠덤롤러(6-8Ton) : 48 Hr - 그레이더(3.6m) : 24 Hr 3. 아스팔트 플랜트 조립 - 기계공 : 90인 - 비계공 : 72인 - 인 부 : 120인 - 크레인(트럭 10TON) : 150Hr - 기초콘크리트 : 40㎥ 5. 플랜트 운반 - 인건비 : 비계공 : 2인 인 부 : 2인 - TRUCK CRANE : 10TON - 운반비 : 트레일러 20TON : 4대	품셈 12-12 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
			6. 골재 저치장 설치 (100TON) - 형틀목공 : 50인 - 인 부 : 100인 - 각 재 : 29.29㎥ - 원 목 : 20.06㎥ - 판 재 : 22.41㎥ - 잡재료비 : 인건비의 2%
b	아스팔트 콘크리트 플랜트 철거	식	1. 철 거 - 기계공 : 60인 - 비계공 : 50인 - 인 부 : 86인 - 크레인(트럭10Ton) : 90Hr 2. 운 반 (PLANT 1기당 트레일러 20TON : 4대) - 인건비 : 비계공 2인 인 부 2인 - TRUCK CRANE : 10TON	품셈 12-12 참조
6.27 a	쇄석골재생산 (현장암 유용)	㎥	- 콘크리트용 조골재 1. 절취(무대) 2. 소할 : 15% (기계소할,토공에서처리) 3. 적사(로우더 무한궤도 1.72㎥) 4. 운반(현장암～C/R장) DUMP TRUCK 15TON 5. 크럇샤 투입(로우더 무한궤도 1.72㎥) : 2대 6. 크라싱 (크럇샤 150 TON) 7. 생산품 정리(로우더 타이어 1.72㎥)

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
6.27 a	보조기층 생산 (현장암 유용)	㎥	1. 보조기층용 조골재(현장암 유용) 1) 절취 2) 소할 : 15% (기계소할,토공에서처리) 3) 적사 (로우더 무한궤도 1.72㎥) 4) 운반 (현장암～C/R장) 덤프15TON 5) 크럇샤 투입 (로우더 무한궤도 1.72㎥) 2. 보조기층용 세골재 1) 골재구입 및 운반 : 별 산 2) 크럇샤 투입 (로우더 무한궤도 1.72㎥) 3. 암파쇄 및 혼합 (크럇샤 150TON) 4. 생산품 정리(로우더 타이어 1.72㎥) - 계수 및 효율 : f = 1, E = 0.60
b	동상방지층 생산 (현장암 유용)	㎥	1. 동상방지층용 조골재(현장암 유용 : 재크라싱) 1) 절취 2. 소할 : 15% (기계소할,토공에서처리) 3) 적사 (로우더 무한궤도 1.72㎥) 4) 운반 (현장암～C/R장) 덤프15TON 5) 크럇샤 투입 (로우더 무한궤도 1.72㎥) 2. 크라싱 (재투입식 JAW CRUSHING 18"x36" 110HP) 3. 생산품 정리(로우더 타이어 1.72㎥) - 계수 및 효율 : f = 1, E = 0.60

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
6.28 a	기타공 세골재 운반	㎥	1. 원석대(채취료) 2. 적 사 - 장비 : 타이어페이로우더 1.72M3 - 거리 : L=8m - 계수 및 효율 : f=1.0, E=0.75 3. 운 반 - 장비 : 덤프 15TON - 계수 및 효율 : f=1.0, E=0.9	품셈 11-5 참조 품셈 11-11 참조
b	줄눈 제작용 자재운반 (공장 ～ 현장창고)	ton	1. 운반비 - 인부 : 창고 2인 운반 6인(3개조) 트럭상차 2인 - 장비 : 카고트럭 11.5TON - 운반거리 : 15 x 2 = 30M 2. 하차비	하치장 → 트럭 15M 인력운반 기본공식 적용 품셈 9-1 참조
c	모래구입 및 운반	㎥	1. 모래 구입 : 견적 단가 2. 운 반 : 덤프트럭 : 15TON
d	몰탈용 모래구입 및 운반 (골재원-현장)	㎥	1. 모래 구입 : 견적 단가 2. 운 반 : 덤프트럭 : 15TON
6.29	소형 고압블럭 포장 회색 적색	㎡	1. 소형 고압블럭 (T=6cm) 2. 모래구입 및 운반 3. 부설비 - 보통인부 : 0.092인 - 특별인부 : 0.031인 4. 잡재료비 (인건비의 5%)	품셈 12-21 참조