교량 및 구조물 시공관리 요령

1997. 5

경기건설사업소

품질관리부

1. 설계도서 검토

구조물 시공에 앞서 감독 및 시공사 직원은 구조물 시공관련 설계도서를 면밀히 검토, 설계자의 의도를 파악하고 도면과 시공상의 문제점을 도출하여야 하며 새로 변경된 지침이나 규정의 적용여부 등을 반드시 검토하여야 한다.

2. 측   량

도면상에 나와 있는 구조물의 각 지점 좌표값과 포장 계획고부터 기초까지 EL을 역산하여 확인하여야 하며 skew값의 적정성 및 통과 높이의 확보 등을 실제로 측량하여 확인하여야 한다.

또한 가C.P 및 TBM 설치시는 측량을 여러번 반복하고 감독의 확인을 받는다.

3. 검측서류

검측의뢰서는 감독이 현장대리인에게 받는 문서로서 현장소장 및 시험실장의 사전 확인이 있어야 한다.

검측의뢰서는 공종별, 위치별로 분류하여야 하며 특히 교량시공은 기초부터 교면 방수에 이르기 까지 교량별로 편철하여야 한다.

검측의뢰서는 도면, 토질주상도, 시공상세도, Check List, 시험성과표, 측량성과표, 관련사진, 콘크리트 타설계획서 등이 포함된다.

4. 시공상세도( Shop Drawing )

시공상세도는 도면에는 없지만 시공에 필요하거나 도면상의 불충분한 사항을 보완할 경우, 또한 기능공의 착오예방 및 현장여건에 맞게 조정 시공시 작성토록 되어 있으며 시공자가 작성, 감독의 확인 및 서명을 받아야 한다.

시공상세도 작성목록은 특별시방서 뒷면에 수록되어 있다. 시공상세도는    관계철에 공종별로 관리하여야 한다.

예)

시공상세도

▣ NO : 교-2

▣ ○○교량 교대 시공시 전면의 무늬거푸집 시공을 아래와 같이 시공코자 합니다.

면기(3×3)

단면 A-A

1997. 5.   .

작 성 자 : 현장대리인 ○○○ (인)

확 인 자 : 주  감  독 ○○○ (인)

5. 시공 CHECK LIST

시공 CHECK LIST의 운용은 1차로 하도급자나 시공사 담당자가 CHECK LIST  점검후 검측서를 작성하고, 2차로 시공사 시험실장이나 공종팀장이 확인 및  점검하며 3차로 현장감독이 최종확인.

6. 기   초

1) 터파기

터파기시 사면의 안정성을 확인하여야 하며 원활한 배수유도에 유의해야 한다.

2) 직접기초

직접기초의 시공은 시방서나 지침에 의거 시공하되 터파기때부터 지지력  시험이 가능하도록 고려하여야 한다.

3) 파일기초

땅속의 지반이 불규칙한 경우가 많으므로 시항타를 하여 적정한 Pile을   선정하는 것이 중요하며 말뚝 두부가 깨지지 않도록 시공하여야 한다.

말뚝두부가 손상되면 말뚝두부의 단면적이 줄어들어 계속 파손만 될뿐이다. 시공시 사용된 Pile길이를 기록하고 시공직후 개개의 Pile 상단고를 측량하여 정산보고한다.

4) SIP 기초

시항타후 결정된 소요 Pile로 부터 시멘트량과 물량을 계산하여 사용될   시멘트가 모두 준비되어 있는지 확인하고 시공하여야 하며, 물차를 대기  시켜야 한다. 말뚝의 삽입직후 시멘트 밀크가 충분히 분출되어야 한다.

5) 날개벽

교량의 기초철근 배근시 날개벽 철근을 반드시 배근하여야 한다.

7. 무늬거푸집

무늬거푸집 문양의 선택은 주변과 조화를 이루는 무늬로 선택하여야 하며   해체가 용이하고 철근피복에 지장을 주지 않은 두께의 무늬거푸집으로 한다.

8. 벽   체

벽체 검측시 좌표값 및 EL 측량을 확인하고 설치될 Shoe크기에 의한 받침   Con'c의 규격 등을 조정한다. 또한 무늬 거푸집이 날개벽에도 설치 되었는지를 확인한다.

착안사항으로 EXP.J부에서 누수현상 발생으로 ABUT 전면부에 물이 넘치는  현상을  막기위해 파라페트부와의 접속부에 물줄기홈을 설치한다.

물줄기홈(5×3)

ABUT

9. 파라페트

파라페트 철근 조립시 EXP.J용 하부철근을 반드시 배근하여야 한다.

10. 무수축 몰탈

단가 산출서의 배합표나 시공사의 추천 배합표로 시공시 강도가 부족하거나 workability가 불량하므로 별도의 배합설계를 실시하여야 하며 유동화제등으로 물의 양을 줄여 강도 및 작업성을 개선할 수 있다.

11. 빔 거치

빔은 Camber가 형성되어 있어 Shoe에 수평으로 설치되지 못하므로, 두께가  조절된 Sole Plate가 설치되곤 한다.

이때 Sole Plate는 Shoe와 4면 필렛 용접한다.

Beam

shoe

(      ) sole plate

ABUT

12. 상판 SLAB

1) 동바리

동바리 구조검토를 확인하고 검토된대로 시공되는지 확인한다.

2) 거푸집

Slab 거푸집이 완료되면 박리제를 철근에 묻지않게 도포하고 측량을   실시하며 거푸집의 편구배 및 EL을 측정한다.

3) 철 근

철근의 이음은 한곳에 집중시키지 말아야 하며, 겹이음시 겹이음 길이를 준수토록 하고, 철근의 절단 위치를 임의로 변경해서는 안된다.

또한 EXP.J용 하부철근을 반드시 배근 한다.

4) Deck Finisher

Deck Finisher가 이동중 이탈하거나 처지면 품질관리에 막대한 지장을 주게 되므로 Deck Finisher의 지지가 확실하도록 다리보강 용접에 유의하여야 하며 Deck Finisher EL을 검측하고 시운전을 시행, 철근과의   이격여부를 확인한다.

5) Con'c 타설

Con'c 타설시 만약의 사태에 대비하여 목수를 하부에 대기시켜 확인토록하고 Pump Car의 고장시를 대비하여 연락처를 확보해 둔다.

또한 Vibrator등도 여유 있게 준비하고 Con'c 타설 완료후 남은 Con'c 처리에도 계획을 수립하여 둔다. 또한 Con'c 타설 즉시 비닐을 도포, Con'c 표면의 건조수축에 의한 균열을 예방하며, 특히 주수 작업을 충분히 시행하여 초기 균열 발생을 최대한 억제 하여야 한다.