번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
5.01	굴착 TYPE-1～6	m3	1. 기계정비 : TYPE별 천공(T2), 착암(cm) 산정 1) 점보드릴 (Boom -3EA) 2) 발전기 (150kW)
			2. 굴착재료비 1) 화약 : Emulsion, Pr-Anfo, D-Cord (설계도서에 따름) 2) 비전기뇌관 : GT/T. Bunch (설계도서에 따름) Bit : 수량 + 200m/EA Shank Adapter : 수량 ÷ 1,200m/EA× 0.9 Extention Rod : 수량 ÷ 800m/EA× 0.9 Coupling Sleeve : 수량 ÷ 800m/EA× 0.9
			3. 노무비 ※ TYPE별 소요작업(P), 갱내작업(R) 별산
	CYCLE TIME 및 작업인원 편성착암		※ CYCLE TIME은 터널단면(TYPE)별 산정한다. 가. 전단면 -착암준비 : 10-30분 -장약 및 발파 : 40-50분 -환기 : 40-50분 -부석 및 기타정리 : 20-30분 -천공 T1 = L ÷ H ÷B 여기서 L : 1발파당 천공길이 (천공장) H : JUMBO DRILL의 평균 천공속도 (m/min) B : JUMBO DRILL의 BOOM수	※ 전단면 굴착은 표준품셈의 상반단면을 표준으로한다.
			나. 상반단면 -착암준비 : 10-30분 -장약 및 발파 : 40-50분 -환기 : 40-50분, -부석 및 기타정리 : 20-30분 -천공 T1 : 전단면과 동일 방법으로 산정
			다. 하반단면 -굴착준비 ～, -부석 및 기타정리 :상반단면 굴착의 65% 적용, -천공 T1 : 전단면과 동일 방법으로 산정

번호	공 종	단위	단 가 기 준															비 고
	1 발파당 CYCLE TIME				1.착암
						(10분) 2. 버럭처리
									(10분) 3. 숏크리트
													(20분) 4. Rock Bolt
	갱내노임산정	식	PW(노임합계) : (2PD+PN)/3 × (1+α) = 1.25P×(1+α) - PD(주간) = P ----- (8시간 기본노임) - PN(야간) = P(1+0.25+0.5) = 1.75P 0.25 : 야간능률저하 25%, 0.5 : 야간근로 할증 50% α : 장대터널 할증률 ∴ 주야간 3교대시 노임은 기본노임의 1.25×(1+α)를 적용
	소요 작업조	식	조 : cm ÷ 60분/시간 ÷ 8시간 : 착암, 버럭처리, 숏크리트, Rock Bolt에 적용 cm : 각 곶오별로 CYCLE TIME 적용 (분) 착암공 1, 버력처리 2, 숏크리트 1, Rock Bolt 1
	공종별 작업인원 편성	식	가. 착 암
				구 분			표준단면-1, 2, 3			표준단면 -4, 5, 6			비 고
							전단면			상 부	하 부
				작 업 반 장			2			1	1		10～18M3:1인, 35～40M3이상 3인
				중 기 운 전 수			1			1	1		JUMBO 1대당 1인
				중 기 조 수			1			1	1		JUMBO 1대당 1인
				갱 내 인 부			3			3	3		파이프, 환기등 기타정리
				화 약 공			1			1	1		화약갱내운반, 발파점검, 폭파, 발파후 점검
				화 약 공 조 수			2			2	2		화약공 작업보조
				계			10			9	9
			나. 버럭처리 갱 내 인 부 : 2인(버럭처리 준비, 파기 및 기타뒷정리 중기 운전수 : 1인(로더 1.72M3) 중 기 조 수 : 1인

번호	공 종	단위	단 가 기 준											비 고
	공종별 작업인원 편성	식	다. 숏크리트
				구 분							인 원 (인)	비 고
				숏크리트				중기운전수			2
								특별인부			1
								보통인부			3
								소계			6
				구 분							단면별(TYPE) 인원구성
				계				표준단면			표준단면-1,2,3	표준단면-4,5,6
								특별인부			1	1
								기계운전수			2	2
								철 공
								보통인부			3	3
								계			6	6
			라. ROCK BOLT, Fore Poling, Pregrouting ① 점보드릴 천공시(상부 반단면의 경우 높이가 5.8m 이상시 점보드릴 사용)
				구 분					인원(인)	비 고
									하 부
				천공, 볼트체결 및 기타			착 암 공		-
							중기 운전수		1	Boom 3EA
							중 기 조 수		1	Boom 3EA
							갱 부		2
							특 별 인 부		1
							보 통 인 부		2
							소 계		7
				그라우팅			기계 운전수		1	Grouting Pump, Mixer
							특 별 인 부		1	그라우팅정리, 배급(재료운반 투입은 상기 보통인부 포함)
							소 계		2
				계					9

번호	공 종	단위	단 가 기 준								비 고
	공종별 작업인원 편성	식	② 싱커드릴 천공시(TYPE-4,5,6의 상부반단면의 경우 높이가 5.8m 이하시)
				구 분				인원(인)	비 고
								하 부
				천공, 볼트체결 및 기타			착 암 공	2	착암기 2대
							중기 운전수	-
							중 기 조 수	-
							갱 부	2
							특 별 인 부	1
							보 통 인 부	2
							소 계	7
				그라우팅			기계 운전수	1	Grouting Pump, Mixer
							특 별 인 부	1	그라우팅정리, 배급(재료운반 투입은 상기 보통인부 포함)
							소 계	2
				계				9
				※ 각 단면의 상부 Rock Bolt는 Resin을 사용시 그라우팅 인건비를 제외함.
5.02	버럭처리	m3	가. 전단면 -버럭처리 : 5-10분 -운반차입환 : 3-5분 -버럭처리 뒷정리 : 5-10분 -측량 : 5-15분 1. 적사 (페이로더 무한궤도 1.72m3) 1) 로더 : 무한궤도 1.72m3 K=0.55, m=2.0, ℓ=8.0m, T1=12초, T2=14초 cm = 2.0 × 8.0 + 12 + 14 = 42초 2) 표준단면 1～3 f = 1 / L, E = 0.25 Q = 3600×1.72×0.55×f×E÷cm 3) 표준단면 4～6 f = 1 / L, E = 0.25 Q = 3600×1.72×0.55×f×E÷cm 4) T2 T2 = 60×버럭처리량(1굴진당 처리량)÷Q ※ f : 현장여건별 E : 품셈적용

번호	공 종	단위	단 가 기 준											비 고
	버럭처리	m3	나. 상반단면 -버럭처리준비 : 5-15분, -운반차입환 : 3-5분, -뒷정리 : 10-20분 -측량 : 5-15 분 -버럭처리T2 : 전단면 내용참조
			다. 하반단면 -버럭처리준비 ～, -측량 : 상반단면의 65% 적용 -버럭처리T2 : 전단면 내용참조
			※ TYPE별 1발파당 버럭처리량(Q)산정 1. 적사 (로더 : 무한궤도 1.72m3) 2. 운반 (덤프 : 10.5ton): Type 별 단위중량 Type 1,2 : 2.5 t/m3 Type 3,4 : 2.3 t/m3 Type 5,6 : 2.0 t/m3 3. 버럭처리노무비 : TYPE별 소요작업조(P), 갱내작업(R):별산 장대터널할증(R1) 산정 ※ 암버력 현장 유용시 갱내운반과 갱외운반으로 구분하여 단가를 구성하여야 함.
5.03	강지보공 TYPE-1～6	조	1. 강지보공 제작 1) H형강 지보재 (ton 당)
				구 분		지 보 재 규 격
						100×100×6×8			125×125×6.5×9		150×150×7×10
				철공공(인)		7.2			5.8		4.9
			2) 격자지보재 (ton 당)
				구 분	지 보 재 규 격
					50×20×30			70×20×30		95×22×32		115×22×32
				철공공(인)	9.9			9.2		8.5		8.4
			※ 1) 본 제품은 강지보재를 제작하는 품으로 , 용접비 및 공장경비도 포함된 것이다. 2) 중량은 볼트, 너트를 제외한 모든 강재의 중량으로 한다. 3) 운반은 별도 계상한다.

번호	공 종	단위	단 가 기 준											비 고
	강지보공 TYPE-1～6	조	2. 강지보 설치비 1) H형강 지보재 (조당)
				구 분			단위	규격	수 량
									전단면굴착	상하반분할굴착
										상반		하반
				인력	동발공 보통인부		인 ”	-	1.04 0.30	0.85 0.24		0.41 0.16
				장비	로더(타이어)		시간	2.29㎥	0.50	0.42		-
			2) 격자지보재 (조당)
				구 분			단위	규격	수 량
									전단면굴착	상하반분할굴착
										상반		하반
				인력	동발공 보통인부		인 ”	-	0.80 0.23	0.66 0.19		0.31 0.13
				장비	로더(타이어)		시간	2.29㎥	0.42	0.33		-
5.04	숏크리트	회당	가. 전단면 -준비:10분 -바닥청소 및 면정리:T1 -와이어매쉬설치:T2 -뿜어붙임 : T3 -잔재제거 : 20분 -장비점검 : 10분 1) T1 : 면정리면적(1굴진당) ÷ 64 m2/hr × 60분 2) T2 : 와이어매쉬설치 천공 : EA × L(1개길이)× 0.9m/분(상하단면은 1.1m/분) + EA × 1분 EA : 1굴진당 와이어매쉬 Pin 총갯수

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
	숏크리트	회당	3) T3 : 뿜어붙임 Q = q × E(1-손실률) m3/hr q = 13m3/hr, E = 0.55 손실률 : 상부 15%, 하부 10% T2 : V/Q × 60분 V : 숏크리트타설 대상 수량
			나. 상반단면 -준 비 : 10분 -바닥청소 및 면정리 : T1 -와이어매쉬 : T2 -뿜어붙임 : T3 -잔재제거 : 20분 -장비점검 : 10분 T1 T2 T3 : 전단면 내용참조
			다. 하반단면 -준비, 잔재제거, 장비점검 : 상반단면의 65% 적용 T1 T2 T3 : 전단면 내용참조
	숏크리트공 TYPE-1～6	m3	1. 숏크리트 : TYPE별 산정 2. 공기압축기 (600 C.F.M) 3. 노무비 : TYPE별 소요작업(P), 갱내작업(R) 산정 4. 기타 잡재료비 : 노무비의 3%
	강섬유보강 숏크리트	m3	※ TYPE별 산정요 1. 시멘트 : (별산) 2. 모래구입운반 3. 자갈구입운반 4. 급결제 5. 유동화재 6. 강섬유 (ø0.5, 35mm) 7. 물 사용료 8. 콘크리트 생산시 라이닝 콘크리트 배치플랜트를 사용하고 터널내 운반을 계상한다. 9. 콘크리트 구입시 숏크리트 배치 플랜트를 별도로 설치하여 운영한다.(Q=60m3/hr)

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
	숏크리트 갱구부	m3	※ 수량 : 별산 1. 숏크리트 2. 공기압축기 (600 C.F.M) 3. 노무비 : 숏크리트 TYPE별 참조
5.05	ROCK BOLT 상부	set	※ 1발파당 수량, cm, 천공(`T1) 별산 가. RESIN - 싱커 (상부반단면의 높이가 5.8m 이하시) 1. 천공 1) 싱커(2.7㎥) 2) 공기압축기(125 C.F.M) 3) 에어호스(3/4″) 4) BIT : 수량 ÷ 200 × 0.9 2. Rock Bolt(ø25 × ℓm) 재료비 : 수량 × 1.03 3. Grouting 급결용 : 1ea, 팽창용 : 1ea 충진용 : (ℓm - 급결용 - 팽창용)ea 4. 노무비 : TYPE별 소요작업(P), 갱내작업(R) 산정 5, 잡재료비 : 인건비의 3%
			나. RESIN식 - 점보드릴 (상부반단면의 높이가 5.8m 이상시) 1. 천공 1) 점보드릴(3-BOOM) 2) 발전기(150kw) 3) BIT : 수량 ÷ 200× 0.9 4) SHANK ADAPTER : 수량 ÷ 1,200 × 0.9 5) EXPENSION ROD : 수량 ÷ 800 × 0.9 6) COUPLING SLEEVE : 수량 ÷ 800 × 0.9 2. Rock Bolt(ø25 × ℓm) 재료비 : 수량 × 1.03 3. Grouting 급결용 : 1ea, 팽창용 : 1ea 충진용 : (ℓm - 급결용 - 팽창용) ea 4. 노무비 : TYPE별 소요작업(P), 갱내작업(R) 산정 5. 잡재료비 : 인건비의 3%

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
	ROCK BOLT 상부	set	다. 몰탈식 - 싱커 (상부반단면의 높이가 5.8m 이하시) 1. 천공 1) 싱커(2.7㎥) 2) 공기압추기(125 C.F.M) 3) 에어호스(3/4″) 4) BIT : 수량 ÷ 200 × 0.9 2. Rock Bolt(ø25 × ℓm) 재료비 : 수량 × 1.03 3. Grouting 1) 모래구입 및 운반 (구조물공 참조) 2) 몰탈흘림방지켑, 혼화제(팽창), 급결재(분말형) : set당 배합 3) Grouting Pump (30～60ℓ/분 3.7kw) 4) Grouting Mixer (190 × 2ℓ/분, 2kw) 5) 공기압축기(125 C.F.M) 4. 노무비 : TYPE별 소요작업(P), 갱내작업(R) 산정 5, 잡재료비 : 인건비의 3%
			라. 몰탈식 - 점보드릴 (상부반단면의 높이가 5.8m 이상시) 1. 천공 1) 점보드릴(3-BOOM) 2) 발전기(150kw) 3) BIT : 수량 ÷ 200× 0.9 4) SHANK ADAPTER : 수량 ÷ 1,200 × 0.9 5) EXPENSION ROD : 수량 ÷ 800 × 0.9 6) COUPLING SLEEVE : 수량 ÷ 800 × 0.9 2. Rock Bolt(ø25 × ℓm) 재료비 : 수량 × 1.03 3. Grouting 1) 모래구입 및 운반 (구조물공 참조) 2) 몰탈흘림방지켑, 혼화제(팽창), 급결재(분말형) : set당 배합 3) Grouting Pump (30～60ℓ/분 3.7kw) 4) Grouting Mixer (190 × 2ℓ/분, 2kw) 5) 공기압축기(125 C.F.M) 4. 노무비 : TYPE별 소요작업(P), 갱내작업(R) 산정 5, 잡재료비 : 인건비의 3%

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
	ROCK BOLT	공	가. 전단면 -준비:10분/공, -천공시간: T1/공, -공내청소 : 0.5분/공, -충진 : 1분/공 -정착 : 1분/공, -이동기타 : 10분/공 T1 = EA × L ÷ 0.9m/분(상,하단면은 1.1m/분) =분/공
			나. 상반단면 -준비 : 10분/공, -천공시간 : T1/공, -공내청소 : 0.5분/공 -충진 : 1분/공 -정착 : 1분/공, -이동기타 : 10분/공 T1 = 전단면 참조
			다. 하반단면 -준비 : 공내청소,충진,정착, 이동기타 : 상단면의 65%적용 T2 = 전단면 내용 참조
	Rock Bolt 측벽	ea	※ 1발파당 수량, cm, 천공(T1) 별산 가. RESIN식 1. 천공 - 싱커인 경우 1) 싱커 (2.7m3) 2) 공기압축기 (125 C.F.M) 3) 에어호스 (3/4″) 4) 빗트 : 수량 ÷ 200m × 0.9 - 점보드릴인 경우 1) 점보드릴(3-BOOM) 2) 발전기(150kw) 3) BIT : 수량 ÷ 200× 0.9 4) SHANK ADAPTER : 수량 ÷ 1,200 × 0.9 5) EXPENSION ROD : 수량 ÷ 800 × 0.9 6) COUPLING SLEEVE : 수량 ÷ 800 × 0.9 2. Rock Bolt(ø25 × ℓm) 재료비 : 수량 × 1.03

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
	Rock Bolt 측벽	ea	3. 급결용 : 1ea, 팽창용 : 1ea 충진용 : (ℓm - 급결용 - 팽창용)ea 4. 노무비 : TYPE별 소요작업(P), 갱내작업(R) 산정 5, 잡재 Grouting 충료비 : 인건비의 3%
			나. 몰탈식 1. 천공 - 싱커인 경우 1) 싱커 (2.7m3) 2) 공기압축기 (125 C.F.M) 3) 에어호스 (3/4″) 4) 빗트 : 수량 ÷ 200m × 0.9 - 점보드릴인 경우 1) 점보드릴(3-BOOM) 2) 발전기(150kw) 3) BIT : 수량 ÷ 200× 0.9 4) SHANK ADAPTER : 수량 ÷ 1,200 × 0.9 5) EXPENSION ROD : 수량 ÷ 800 × 0.9 6) COUPLING SLEEVE : 수량 ÷ 800 × 0.9 2. Rock Bolt(ø25 × ℓm) 재료비 : 수량 × 1.03 3. Grouting 1) 모래구입 및 운반 (구조물공 참조) 2) 혼화제(팽창), 급결재(분말형) : set당 배합 3) Grouting Pump (30～60ℓ/분 3.7kw) 4) Grouting Mixer (190 × 2ℓ/분, 2kw) 5) 공기압축기(125 C.F.M) 4. 노무비 : TYPE별 소요작업(P), 갱내작업(R) 산정 5. 잡재료비 : 인건비의 3%

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
	Rock Bolt 갱구부	ea	※ Rock Bolt Cycle Time산정 : 별산 1. 천공 - 싱커인 경우 1) 싱커 (2.7m3) 2) 공기압축기 (125 C.F.M) 3) 에어호스 (3/4″) 4) 빗트 : 수량 ÷ 200m × 0.9 - 점보드릴인 경우 1) 점보드릴(3-BOOM) 2) 발전기(150kw) 3) BIT : 수량 ÷ 200× 0.9 4) SHANK ADAPTER : 수량 ÷ 1,200 × 0.9 5) EXPENSION ROD : 수량 ÷ 800 × 0.9 6) COUPLING SLEEVE : 수량 ÷ 800 × 0.9 2. Rock Bolt(ø25 × ℓm) 재료비 : 수량 × 1.03 3. Grouting 1) 모래구입 및 운반 (구조물공 참조) 2) 혼화제(팽창) 급결재(분말형) : set당 배합 3) Grouting Pump (30～60ℓ/분 3.7kw) 4) Grouting Mixer (190 × 2ℓ/분, 2kw) 5) 공기압축기(125 C.F.M) 4. 노무비 5, 잡재료비 : 인건비의 3%

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
	Fore Poling	개소	※ 개소당 cm, 천공(T2) 별산 1. 천공 - 싱커인 경우 1) 싱커 (2.7m3) 2) 공기압축기 (125 C.F.M) 3) 에어호스 (3/4″) 4) 빗트 : 수량 ÷ 200m × 0.9 - 점보드릴인 경우 1) 점보드릴(3-BOOM) 2) 발전기(150kw) 3) BIT : 수량 ÷ 200× 0.9 4) SHANK ADAPTER : 수량 ÷ 1,200 × 0.9 5) EXPENSION ROD : 수량 ÷ 800 × 0.9 6) COUPLING SLEEVE : 수량 ÷ 800 × 0.9 2. Steel pipe (ø=42.7mm, t=2.9mm) : KS 규격품 수량 : × 1.05 3. Grouting 1) 모래구입 및 운반 (구조물공 참조) 2) 혼화제(팽창) : set당 배합 3) Grouting Pump (30～60ℓ/분 3.7kw) 4) Grouting Mixer (190 × 2ℓ/분, 2kw) 5) 공기압축기(125 C.F.M) 4. 노무비 : Rock Bolt공 참조 5, 잡재료비 : 인건비의 3%

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
5.06	라이닝콘크리트 (무근, D = 32mm)	m3	1. 생산 1) Batch plant (120m3/hr) a) 기계사용료 : Q = 2.0, E = 0.75, cm = 1.5 b) Plant 가동 보조인원 : 보통인부 3인 2) 시멘트 구입 및 운반 : 별산 3) 혼화제사용 : 재료비 : 0.537(kg) 4) 세골재 구입 및 운반 : 별산 5) 조골재 생산 : 별산 6) 골재투입 (로더 1.34m3) 7) 물사용료 (5,500ℓ) 2. 운반 (B/P ～ 현장) 콘크리트 믹서트럭 (6.0m3) Q=6.0, T1=6.0/3.0×1.5 =3.0(분), T2=별산, T3=2.5+10=12.5(분),T4=7.5(분) 3. 타설 ※ Slump : 8～12cm, 1일타설량 : 100m3이상 작업능력 : 26.7m3/hr 배치플랜트 : 120m3/hr, 30m3/hr(능력) 1) 펌프카 사용료 2) 타설 인부(붐타설) : 콘크리트공 0.06인, 인부 0.04인 3) 다짐기계경비 (Vibrator 45kg)
	철근가공조립(복잡)	ton	배수공 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
	강재동바리 및 거푸집	조	※ 평균손율 : 30% (0.3) 잔 존 률 : 10% (0.9) 1. 재료비 1) 형강 : H,C,L 형강 : 수량 × 1.07 2) 강판 : T = 6～15mm : 수량 × 1.1 3) 볼트, 너트 : 수량 × 1.05 4) 바퀴자재 : 1식 5) 고재대 2. 운반비 : 운반경로에 따라 산정 3. 제작비 1) 노무비 : 조건식에 따라 산정 2) 재료비 : 조건식에 따라 산정 3) 경 비 : 조건식에 따라 산정 4. Jack 손료 : 터널내 Lining 타설예정일수 산정 적용 1) 유압식 Jack : 4대 2) Screw Jack : 10대 5. 거푸집이동 및 거치 ※ 터널연장, 거푸집제작(조)에 따라 이동 및 거치횟수 산정 노무비 : 거푸집(조) 당면적(AS) 산출하여 산정 6. Rail 부설 및 철거 ※ 부설연장 및 set당 부설연장에 따라 노무비 산출
	라이닝콘크리트 (신축이음)	m	1. 재료비 1) 스치로폴(T=20m/m) 0.235m2/m × 재료비 × 1.1 2) 설치비 (재료비의 5%)

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
	라이닝콘크리트 (신축이음)	m	2. 충진제 1) High Tesnsion Expansion (우레탄실런트 us) g = 0.04 ×0.02 ×1180kg/m3 = 0.994kg/m 0.994kg/m × 재료비 2) 접착제(우레탄 프라이머 UP) 0.04 × 2 × 0.25ℓ/m2 × 1.03 × 재료비 3) Back up 제 (R=25mm) 1.03mm × 재료비 4) 설치비 보통인부 : 6인/100m
	터파기 난간용 Steel Pipe	식	배수공 및 구조물공 참조
5.07	방 수 공 (Filter 콘크리트)	㎥	1. 시멘트 : 구입 및 운반 별산 2. 모래구입 및 운반 (구조물공 참조) 3. 쇄석골재구입 및 운반(구조물공 참조) 4. 콘크리트 믹서(0.45m3) 5. 콘크리트 타설 콘크리트공 : 0.15인, 보통인부 : 0.62인
	방수공 (방수막+부직포설치) (굴착부분)	㎡	1. 재료비 1) 부직포(1차) : 1.15m2 2) 방수 Sheet(2차) : 1.15m2 3) 부자재 : 3set × 1.03 2. 운반 및 설치 1) 방수공 : 0.11인 2) 특별인부 : 0.03인 3) 보통인부 : 0.03인 3. 기구손료 : 재료비의 2%

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
	배수공(용수처리) (누수지점유도배수)	m	1. 재료비 (V-Section) 1.0m 2. 설치비 (재료비의 5%)
	P.V.C Pipe(ø100mm)	m	1. 재료비 : 수량 × 1.03 2. 설치노무비 (고무링 접합) 배관공 : 0.06인/개소당 특수인부 : 0.11인/개소당
	방수막	m2	1. 자 재 비 : 시트지 : 2.2m2/m 아스팔트 프라이머 : 0.4ℓ 2. 인 건 비 : 방수공 : 0.4인 인 부 : 0.25인 3. 기구손료 : 인건비의 3%
	방수막 보호공	m2	1. 재료비 ․ 배수공 참조 ․ 경 비 : 0.01m3/m2 × 1.15 ․ 노무비 : 0.01m3/m2 × 1.15 ․ 재료비 : 0.01m3/m2 × 1.15 2. 바르기 ․ 미장공 : 0.05인 ․ 인 부 : 0.05인
5.08	부직포 설치	m	1. 부직포 ․ 재료비 : 1.0m × 1.05 2. 잡재료비(주재료비의 2%) : 수량 × 0.02 3. 설치비 ․ 보통인부 : 0.003인/m2

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
	터널 배수공 비닐깔기	m2	1. 비닐자재비 (0.1mm × 180cm × 91m) ․ 재료비 : ￦/m2 × 1.05 2. 설치비 : 인부 0.01인/m2
	맹암거 유공관 (아연도강관ø200mm)	m	1. 유공관 1) 자재비(현장도착도) : 1.0m × 1.02 2) 접합 및 부설 배 관 공 : 0.42인/6m 보통인부 : 0.70인/6m 2. 부직포 1) 자재비 : 0.779m2/m 2) 설치비 : (재료비의 5%) 3. 골재구입운반 (동상방지층재) 4. 골재소운반 5. 부설비 인부 : 0.13인 × 0.317m3/m
5.09	배수파이프	m	(스파이럴씸덕트관 ø300～400mm) 1. 자재비(현장도착도) : 1m × 1.03 2. 접합 및 부설비 배 관 공 : 0.096～0.135인/6m × 1m 특별인부 : 0.096～0.135인/6m × 1m
	공동구뚜껑제작설치 (550 ×500)	ea	1. 거 푸 집 2. 콘크리트 타설 3. 철근가공조립 4. 설치비 1) 소운반 (리어카, L = 100m) 보통인부 : 2인/Q 2) 설치비 보통인부 0.04인

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
	배수뚜껑설치 (530×480,그레이팅)	ea	1. 재료비 1EA × 재료비 2. 설치비 2인 1조 100개/일 설치 2인 × 노무비 / 100
	공동구콘크리트타설 (fck = 240kgf/㎠)	m	1. 콘크리트 1) 골재최대치수 : ø19mm 2) 압축강도 : fck = 240kgf/㎠ 3) 슬럼프 : 2cm 2. 운반 1) 콘크리트믹서트럭(6㎥) 2) 운반비 별도계상 3. 콘크리트 타설 1) 구체 콘크리트 타설 2) 콘크리트 휘니셔 ․작업량 Q = ㎥/m ․청소 및 가이드라인 설치 : 보통인부 1인 ․콘크리트 휘니셔 작업원 : 2인 ․조인트 설치 : 1인 ․면정리 미장 : 미장공 1인 3) B/H 타설 ․작업량 Q = ㎥/m ․터설인부 콘크리트공 : 0.7인 보통인부 : 0.5인 ․콘크리트 휘니셔 작업원 : 2인 4) 다짐기계(진동기 45kg) ․콘크리트 타설기준 적용 5) 수축줄눈 설치 ․포장공 기준 적용

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
	공동구콘크리트타설 (fck = 240kgf/㎠)	m	1. 콘크리트 1) 골재최대치수 : ø19mm 2) 압축강도 : fck = 240kgf/㎠ 3) 슬럼프 : 2.5cm 2. 운반(B/P - 현장) 1) 콘크리트믹서트럭(6㎥) 2) 운반비 별도계상 3. 콘크리트 포설 1) 터널공동구 콘크리트포설(콘크리트휘니셔) ․ 작업량 Q = ㎥/m ․ 청소 및 가이드라인 설치 - 1인 ․ 콘크리트휘니셔 작업원 - 2인 ․ 콘크리트 정리 - 2인 ․ 조인트설치(면정리 및 미장) - 2인 2) 기계경비(콘크리트 휘니셔) 3) 콘크리트 양생 ․ 콘크리트 타설기준 적용 4. 수축줄눈 설치 ․포장공 기준 적용
5.12	터널 내부 도장(상부)	m2	1. 재료비 ․ 아크릴 공중함 에멀룐 (KSM 5310) ․ 재료비 0.1L × 수량 2. 도장공 ․ 노무비 : 0.027인 × 1.2 × 수량 3. 기타손료 ․ 노무비의 2%

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
	터널내부 타일붙임(하부)	m2	◦ 바름두께 : 5m/m 1) 타일 (90×190×11m/m) ․ 재료비 : 1.0m2 × 1.03 × 수량 2) 타일 시멘트 (압착용) ․ 재료비 : 3.91(kg/m3) × 수량 3) 타일 시멘트 (줄눈용) ․ 재료비 : 1.48(kg/m3) × 수량 4) 접착제 (부착강호제몰다인) ․ 재료비 : 0.1(kg) × 수량 5) 타일공 : 0.25인 6) 줄는공 : 0.02인 7) 인 부 : 0.13인 8) 소운반 : 0.06인 9) 공구손료 (인건비의 3%)
	터널명판 및 안내판	ea	1. 명판 ․명판규격 : 30cm × 30cm × 45cm ․개소당 : 4EA 가. 재료비 ․화강석 ․30m/m 기준 나. 글자새김 ․석재판당 글자새길 면적 : 20% ․글자면적 : 30 × 30 × 0.2 = 180(cm2/EA) ․석공 : 1.55 인/자 다. 설치비 : 재료비의 5% 2. 안내판 가. 재료비(ALUMINUM주물) : (0.45 × 0.25 × 0.01) ×2,700 kg/m2 나. 설치노무비 : 재료비의 5%

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
	임시전기시설	식	1. 재료비 ․ 갱내임시조명 ․ 150w 백열등을 양측 15m 간격으로 설치 ․ 막장작업구간 30m는 300W 용 4개설치 1) 전선 배선용 갭타이어 케이블 (ø22) 재료비 : 터널연장/2×0.5 2) 전구 (150w) L1= (터널연장 - 30m × 막장개소) 재료비 : L1 / 15 × 2 × 1.4 3) 전구 (300w) 재료비 : 4 × 막장개소 × 1.4 4) 기타 잡재료비 : 재료비의 2% 2. 설치 및 유지비 : 재료비의 3% 3. 전기요금 4. 인입선 설치비
	물푸기공	식	가. 양수기 ․ 구경 : 100mm ․ 출력 : 7.5HP ․ 양정 : m (산출) ․ 유량 Q = m3/min 나. 양수기 설치현황 B = 터널연장/2 다. 양수기 설치대수 : 300m마다 1대설치 (양수기, 양정고손실수두고려) ․ 편측터널 양수기 설치대수( F1) = B/300 ․ 편측터널 양수기 설치대수 : F2 ․ 양측터널 평균양수기 설치대수 : F3 라. 설치기간(D) : 실작업일수 1. 공사비 산출 (1일1시간 양수가동) 1) 양수기(150mm) 2) 목도 및 설치(목도운반) 3) 노무비 : 양수공 1인×D/8 4) PVC Pipe(ø100mm):터널연장×재료비

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
	작업용비계	개당	1. 재료비 ․ 손율(12개월) : P = 0.19(19%) : 공사기간에 따라 산정 1) 강관(R=39mm) T = 1.5mm L × 1.05 × 1조 × P 2) 강관(R=25mm) T = 1.5mm L × 1.05 × 1조 × P 3) 고재(R=39mm, R=25mm) 수량 × 0.05 4) 잡재료비 (재료비의 2%) 2. 잡철물제작 (제작수량산출) 3. 이동설치 : 각 필요작업조에 포함
	대차	대	1. 장비적용 : 6Ton 덤프트럭기준(중고) ․ 각 작업반장에 1대 투입하여 장약, 부석정리, 강지보공 설치, Rock Bolt 및 숏크리트 등의 공종에 사용 ․ 사용대수 : N ․ 작업시간 : 24hr/일 (운행은 6hr, 주야간작업) ․ 작업일수 : 실작업일수 ․ 잔존률 : 10%
	임시 환기시설	식	․ 환기량 Q산정 : 터널연장, 굴착단면적, 터널굴착, 구간에 따라 산정 ․ 환기방식 : 직렬방식 ․ 환기설비 : TURBO 송풍기 사용대수 산정 ․ 작업일수 산정 (터널 굴착시간과 동일) ․ 터널연장 1) 송풍기 (5.5inch, 50HP) 2) 풍관 (ø1000mm) 3) 모터 (50HP) 4) 전력 : 37.3kw/hr

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
	갱문가시설	개소	1. 통나무 설치 ․ 통나무 설치 면적 : 공사용 갱문수량 별도산정(m3) ․ 인 부 : 2.0 × (E / 0.08) × 0.5 2. 모래주머니 쌓기 ․ 쌓기면적(V) : 공사용 갱문수량 별도산정(m3) ․ 모래주머니 개수(N) : 17ea/m3 × V(m3) ․ 인부(만들기) : N 매 / 30 ․ 인부(쌓 기) : N 매 / 100 3. 모래구입 및 운반
5.13	내공변위측정용 기기설치	set	1. 자재비 ․ 볼트 (R = 1inch, L = 0.45m) ․ 기타잡재료비 : 재료비의 5% 2. 설치비 : 재료비의 5%
	지중변위측정용 기기설치	set	1. 자재비 ․ 볼트 + EXTENSOMETER : 4point (1, 2, 3, 4m) ․ 기타 잡재료비 (재료비의 5%) 2. 설치비 : 재료비의 5%
	천단침하측정	set	1. 자재비 (볼트 1inch × 0.45m) 1EA × 재료비 2. 설치비 (재료비의 5%) 3. 잡재료비 (재료비의 5%)

번호	공 종	단위	단 가 기 준								비 고
5.14	숏크리트응력측정용 기기설치	set	1. 자재비 ․ Stress Cell (Tanzential L = 2.0m 기준) : 재료비 : 1EA ․ Stress Cell (Horizontal L = 2.0m 기준) : 재료비 : 1EA 2. 설치비 (자재비의 5%)
	Rock Bolt 축력측정용 기기설치(L = 4.0m)	set	1. 자재비 ․ 볼트 (L = 4.0m) : 재료비 : 1EA ․ 기타 잡재료비 (재료비의 5%) 2. 설치비 (자재비의 5%)
	Rock Bolt인발측정용 기기설치	set	계측비에 포함
	계측비	set	1. 계측분석비
				구 분	단 위	특급기술자 (확 인)		고급기술자 (검 사)	중급기술자 (분 석)
				내공변위측정	1측선 1회당	0.01인		0.02인	0.025인
				지중변위측정	1개당 1회	0.01인		0.02인	0.025인
				천단침하측정	1측선 1회당	0.01인		0.02인	0.025인
				숏크리트응력측정	1개당 1회	0.01인		0.02인	0.025인
				Rock Bolt 축력측정	1개당 1회	0.015인		0.03인	0.035인
	Steel Rib 철거	식	견적처리
	간이오폐수처리시설	식	※ 기계경비 산정 - 터널연장 1 km 이상: 2 회 - 터널연장 1 km 미만: 3 회 1. 간이 오폐수처리시설 1) 토목공사 3) 정화조 본체조적공사 5) 잡철물공사 7) 공과잡비				2) 기계 및 장비설치공사 4) 배관공사 6) 전기공사 8) 운반비
5.15	공기정화 배출시설 설치		※ 대기오염이 예상되는 터널에는 대기오염 방지를 위한 공기정화 배출시설의 설치 를 검토하여야 한다.